“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	용산구청장(공원녹지과장)
(경유)
제목	2016년 주민참여 골목길 가꾸기사업 실행계획 변경 승인

1. 공원녹지과-19734(2016.11.11.)호와 관련입니다.

2. 2016년 주민참여 골목길 가꾸기사업 추진과 관련하여 실행계획 변경을 승인하오니 사업추진에 만전을 기해 주시기 바랍니다.

가. 변경내역

(단위:원)

구분	총사업비			비고
	계	보조금	자부담
당초	81,596,416	79,301,456	2,294,960
변경	82,030,786	79,684,566	2,346,220	증434,370

나. 주요변경내용

- 현장여건에 따른 화단위치 변경 및 화단 내 식재 수종, 초화류 변경

- 원예교육을 통한 주민들의 요구도 반영하기 위한 가든상담소 운영 추가

다. 검토의견

- 현장여건 및 주민의견에 따른 실행계획 변경으로, 골목길을 주민 스스로 가꾸는 사업의 기본방향에 부합되는 내용으로 판단되어 계획변경을 승인함.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	김현정		조경협력팀장	송동명		조경과장	11/18 이원영
협조자
시행	조경과-16487	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 무교로 21 더익스체인지 서울빌딩 9층 조경과	/
전화	02-2133-2036	/전송	02-2133-1080	/		/	대시민공개