투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연장 및 물량변경 계약 요청 (재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용16-528(‘16.11.17)호와 관련입니다.

2.「재사용플라자 건립공사」관급자재(커튼월) 납품기한 변경 및 물량변경 계약 요청이 있어 검토한 바, 아래와 같은 사유로 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물 품 명 : 금속제창(커튼월)

나. 계 약 자 : (주)유니크시스템

다. 납품기한 변경사항

계약번호 (납품요구번호)	품 명	계약자	납품기한		비 고
			변경 전	변경 후
00167005600 (12-16-1-23555-00)	금속제창	㈜유니크 시스템	‘16.04.20∼ ’16.11.20	‘16.04.20∼ ’17. 1.14	55일연장

라. 물량 변경사항

계약번호 (납품요구번호)	품 명	규 격	납품수량		증감
			변경 전	변경 후
00167005600 (12-16-1-23555-00)	금속제창	UNI-CAW101(200)200mm,단열커튼월/ 불소수지2회	35,752.89kg	36,210.94kg	증458.05
	금속제창	UNI-CAW101(160)160mm,단열커튼월/ 불소수지2회	14,003.65kg	14,253.31kg	증 249.66

마. 사   유 : 롤방충방 시공일정 조정등에 따른 납품기한 연장 필요

바. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

붙 임 1) 관급자재(커튼월) 납품기한 및 물량변경 요청(건설사업관리단 검토의견서포함) 1부.

2) 물품매입요구서 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	11/18 김진용
협조자
시행	건축부-16010	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)