문서번호	토목부-23706
결재일자	2016.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	11/18 김영수

중앙분리대 삭제 및 자전거도로 휀스, 차량방호울타리 설치 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

중앙분리대 삭제 및 자전거도로 휀스 ,차량방호울타리 설치 검토보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

유관기관(강동경찰서, 강동구) 및 자전거연합회에서는 자전거이용자 안전사고 예방 및 보행자 무단횡단 방지를 위해 휀스설치 요청, 급경사지 차량겸용 자전거도로 휀스, 보도난간 등에 대하여 검토 보고드림

관련근거

○ ‘15. 6. 8. : 중앙분리대 삭제 검토 보고 승인(본부업무연락전 15-13126)

○ ‘16. 3. 4. : 보행자 방호울타리 설치 협조 요청(경비교통과-3107호)

○ ‘16.10.13. : 자전거도로 난간 설치 요청(강동구 교통행정과-56242호)

○ ‘16.10.20. : 산지측 자전거도로 휀스 설치 요청 민원 회신(연합회)

○ 「도로안전시설 설치 및 관리 지침」(차량방호 안전시설편)

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4차~6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 38,876백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

검 토

○ 자전거 이용자의 안전 및 보행자 무단횡단 방지를 위하여 산지측 자전거도로 휀스 설치 필요 함.(강동경찰서, 강동구청, 자전거연합회 요청)

○ 중앙분리대 삭제와 이에 따른 차량방호울타리 단부 부분에 설치예정인차량 충격흡수시설(12개중 10개)은 삭제하고, 생태육교 중앙벽체 입·출구앞에 2개소 설치가 필요 함.

○ 오수중계펌프장 ~ 토우식당 구간은 성토고 3m~6m이상으로 차량의 도로 이탈 방지와, 부체도로 급경사지에 대하여는「도로안전시설 설치 및 관리 지침」(차량방호 안전시설편)에 의해 자전거도로 휀스 겸용 차량방호울타리 및 보도난간 설치가 필요 함.

○ 「서울형 자전거도로 설치 및 유지관리 매뉴얼(2012. 2)」지침에 의하여 부족한 자전거도로 폭(0.4m 부족, 측대 폭 0.1m부족) 확보를 위하여 중앙분리대 삭제 현황보고에 대하여 금번 실정보고하여 반영 필요

※ 동 공사 성토 부분중 SH공사에서 도로경계석 부분에 공사용 가림막 설치구간은 차량방호울타리 및 보도난간 제외함.(sh공사 택지설계부-3128호, ‘16.11.11.)

○ 수량 변경 현황

공종	규 격	단위	수량			비고
			당초	변 경	증․감
중앙분리대		경간	748	-	감)748
자전거도로난간 (일반부)	H1280×W2000	m	1,689	4,986	증)3,297
차량 겸용 자전거도로 난간(성토부)	H1200×W3000	m	-	376	증)376
차량 방호울타리	H900×W3000	m	-	106	증)106
보도 난간	H1110×W2000	m	-	330	증)330
차량 충격흡수시설		개	12	2	감)10

○ 단가검토

- 단가산출 : 견적가(2개사 이상 비교견적 최저가 적용)

- 강제협의율(90.57%) 적용 : ‘계약당사자의 책임없는 사유’에 해당되는 경우 신규비목 계약단가는 계약당사자간에 협의에 의해 결정하고 협의가 이루어지지 않는 경우 공사계약일반조건 제7절 1. 나항에 의거 강제협의단가 적용

∴  (강제)협의율(90.57%) = [설계가(100%)+낙찰율(81.143%)] / 2

□ 공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	462,026	1,137,454	675,428
제 경 비	1식	36,474	59,946	23,472
공사원가	1식	498,500	1,197,400	698,900
부가가치세	1식	49,850	119,740	69,890
도급공사비	1식	548,350	1,317,140	768,790
관급자재	1식	246,804	-	-246,804
총공사비	1식	795,154	1,317,140	521,986

□ 감리단 검토의견

○ 동 공사 산지측에 자전거 이용자 안전을 위한 자전거도로 난간이 없어 자전거 이용자 안전 및 보행자의 무단횡단 방지를 위해 강동경찰서와 강동구청의 자전거도로 난간 설치 요구로 「자전거 이용시설 설치 및 관리지침」에 따라 1.2m 이상의 자전거도로 난간을 설치 필요함.

○  「도로안전시설 설치 및 관리 지침」에 따라 절개지 구간은 차량겸용 자전거도로 난간과 보도난간을 설치하여 보행자 및 자전거 이용자의 안전을 확보코자 하며, 측도에 차량 방호울타리를 설치하여 차량의 도로이탈을 방지함이 타당하다고 사료됨.

○ 기 승인된 중앙분리대 삭제에 따라 단부앞에 설치 예정인 차량 충격흡수시설은 삭제하고 생태통로 중간벽 입·출구앞 2개소 차량 충격흡수시설을 설치함이 타당한 것으로 사료됨.

※  ‘공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨.

□ 조치계획

○ 중앙분리대 삭제, 자전거도로 휀스, 차량 겸용 자전거도로 난간(성토부)차량 방호울타타리, 충격흡수시설 일부 삭제 등 반영을 위하여 실정보고 한 사항에 대하여 감리단 검토 의견과 같이 반영이 필요함.

○ 증액되는 공사비 521,986천원에 대하여는 추후 설계변경 소심의위원회 심의결과에 따라에 반영하고자 함.

붙 임 : 1. 감리단 검토의견서 1부.

2. 중앙분리대 삭제 및 자전거도로 재 설계 비용 방침 1부.

3. 중앙분리대 삭제 검토 회신  1부.  끝.