문서번호	토목부-23715
결재일자	2016.11.18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		광역도로과장	토목부장
한병찬		代한병찬	11/18 김영수
협조

문화재 발굴(정밀)조사 용역 설계변경(정산)시행 보고

≪율곡로 창경궁 상수도 인입관로 문화재 발굴(정밀)조사 용역≫

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

문화재 발굴(정밀)조사 용역 설계변경(정산)시행 보고

≪율곡로 창경궁 상수도 인입관로 문화재 발굴(정밀)조사 용역≫

책임감리원으로 부터 ‘율곡로 창경궁 앞 상수도 인입관로 이설구간 문화재 발굴(정밀)조사’ 완료에 따른 정산 보고가 있어 검토보고 드림.

※ 관련근거 : 율곡감 2016 - 286호(’16.11.16.) ‘설계정산 검토 보고’

□ 계약현황

○ 계 약 명 : 율곡로 창경궁 앞 상수도 인입관로 이설구간 문화재 발굴(정밀)조사 용역

○ 발굴위치 : 창경궁 내 상수도 인입관로 이설구간(보행로)

○ 발굴규모 : 270㎡

○ 계약기간 : 2016. 9. 2.6 ∼ 2016.11.25.

○ 계약금액 : 58,818,000원

○ 계 약 자 : (재)한백문화재연구원  대표 박경식

□ 감리단 보고내용

○ 정산사유 : 과업범위 축소 및 과업내용서에 의한 직접경비(여비, 현장운영비, 조사재료비 등) 정산

○ 정산내용

- 과업규모 축소 : 270㎡ → 252.90㎡(감 17.10㎡)

- 직접경비 정산 : 실제사용 비용 정산(증빙자료)

‣ 여비, 현장운영비, 조사재료비, 회의비, 위탁비

○ 설계변경(정산) 현황

(단위 : 원)

구분	당 초	변 경	증 · 감	비고
직접인건비	12,838,384	12,024,424	감)813,960
직접경비	26,896,454	20,497,625	감)6,397,829
제경비	10,270,707	9,619,539	감)651,168
학술료	3,466,364	3,246,594	감)219,770
소계	53,470,909	45,388,182	감)8,082,727
부가세	5,347,091	4,538,818	감)808,273
계약액	58,818,000	49,927,000	감)8,891,000

○ 감리단 검토의견

- 과업내용서에 의거 설계정산 관련서류를 검토한 바 상기와 같이 정산금액을 반영하여 설계변경하는 것이 적정한 것으로 판단됨.

□ 조치계획

○ 상기 감리단 검토보고 내용과 같이 ‘율곡로 창경궁 앞 상수도 인입관로 이설구간 문화재 발굴(정밀)조사’ 완료에 따른 정산 보고건에 대해 붙임과 같이 설계변경(정산) 시행코자 함.

붙  임 : 1) 변경설계서(정산) 1 부.

2) 감리 검토의견서 1 부.

3) 직접경비 정산서 1 부.  끝.