문서번호	서울숲공원관리사무소-6100
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울숲공원관리사무소장
박선재	김완수	11/21 윤학수

공사 실정보고사항 검토보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

2016. 11

동부공원녹지사업소

(서울숲공원관리사무소)

공사 실정보고사항 검토보고

(서울숲공원 제비서식처 조성공사)

우리공원에서 시행 중인「서울숲공원 제비서식처 조성공사」추진중 시공사의 공사실정사항이 발생하여 아래와 같이 검토하고 공사에 반영코자 함

Ⅰ		공사개요

❍ 공 사 명 : 서울숲공원 제비서식처 조성공사

❍ 공사기간 : 2016. 10. 28~ 11. 16

❍ 총공사비 : 금35,666,000원

(도급액 : 금33,680,000원/관급자재1,986,000원)

❍ 공사개요

- 논습지조성 300㎡, 전기줄 설치 등

❍ 도 급 자 : ㈜청신종합조경 대표 손신자

Ⅱ		실정사항 보고

○ 주요 변경 내용

(단위 : 원)

구 분	현 안 사 항	조 치 계 획	비 고
1.조경공사	○ 현장여건에 따른 물량 변경	○ 철거 및 토공 증)774,541 1)절토(당초0→300㎥): 증)914,400원 2) 폐기물 상차 (당초93.39ton→12.5ton): 감)139,859원 ○ 식재공 감)729,720 1) 미나리 식재 (당초160본→변경0본): 감)234,720원 2) 물달개비 식재 (당초120본→변경0본): 감)270,000원 3) 동의나물 식재 (당초100본→변경0본): 감)225,000원 ○ 시설공 감)2,517,984 1) 전깃줄 설치 (당초250m→변경400m): 증)67,500원 2) 전기출 앙카설치 (당초0→변경8개소): 증)26,080원 3) 황토포설 300㎡ (당초400T→변경200T): 감)4,126,200원 4) 양수기보관함 (당초0개→변경1개): 증)1,514,636원 ○ 포장공 증)3,314,120 1) 야자매트포장 (당초0→변경100m): 증)2,992,000원 2) 자갈깔기 (당초0→변경10㎥): 증)322,120원 ○ 부대공 1) 자갈소운반 : 증)512,900	증)1,353,857원
	○ 현장여건에 따른 물량 변경	○ 폐기물처리 및 운반 감)1,462,564	감)1,462,564원
2.전기공사	○ 현장여건에 따른 공종	○ 양수기 관리방식 1)이동식 양수기 →고정식 양수기 - 배선 및 기타 전기시설 - 전주설치	증)2,970,000원 (별도발주)

Ⅲ		예산 변경 내역

(단위 : 원)

구 분		소요 금액			비 고
		당 초	변 경	증 / 감
총 공 사 비		35,666,000	37,483,000(증2,970,000)	증3,804,000(증2,970,000)
도급비	소 계	33,680,000(0)	37,484,000(증2,970,0000)	증3,804,000(증2,970,000)
	공급가액	30,618,182(0)	34,076,364 (증2,700,000)	증3,458,182(증2,700,000)
	부가세	3,061,818(0)	3,407,636 (증270,000)	증345,818(증270,000)
관급자재비		1,986,000	1,986,000	0

※ 총공사비 : 증)3,84,000원 --> [조경공사비 : 증)834,000원 / 전기공사 : 증)2,970,000원]

Ⅳ		조치계획

○ 별도발주 대상공사(전기)는 계약시행→계약의뢰(공원운영과)

○ 현장여건에 따른 공사실정사항은 시급성을 감안하여 도급자로 하여금 우선시공하고 추후 도급금액 범위내에서 설계변경코자 함

붙  임 : 1. 변경내역 1부.

2. 설계내역서(전기)  1부.  끝.