투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신자	내부결재
(경유)
제 목	변경계약 체결 - 「망원 초록길 조성공사(총차6회 및 4차3회)」

1. 기전설비2과-844(2014.3.3.)호와 관련입니다.

2. 우리본부 기전설비2과에서 추진 중인 「망원 초록길 조성공사」 건에 대하여 아래와 같이 설계변경 요청이 있어 다음과 같이 계약을 체결하고자 합니다.

가. 공 사 명 : 망원 초록길 조성공사

나. 공사기간 : 2010.1.6. ~ 2014.6.30.

다. 시 공 사 : 통일건설(주) 외 3개사

라. 설계변경 내역

(금액단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증․감
총차	계	25,320,500,000	25,526,400,000	증)205,900,000
	공급가액	23,018,636,364	23,205,818,182	증)187,181,818
	부가가치세	2,301,863,636	2,320,581,818	증)18,718,182
4 차	계	8,349,811,000	8,349,811,000	-
	공급가액	7,590,737,274	7,590,737,274	-
	부가가치세	759,073,726	759,073,726	-

○ 변경사유 : 물가변동 금액 반영(총차6회, 2014년 예산) 및 물량조정(4차3회)

마. 예산과목 : 한강공원이용 및 생태환경개선, 한강접근체계개선, 망원초록길 조성, 시설비 및 부대비, 시설비

붙 임   1. 설계변경(총차6회 및 4차3회) 시행 공문 각 1부.

2. 설계변경 방침서 1부.

3. 설계변경내역서(총차6회 및 4차3회) 각 1부.

4. 감리단 검토의견서 1부.  끝.

★주무관	김대인		총무과장	代김지형		총무부장	03/17 서영관
협조자
시행	총무과-3870	(		)	접수		(		)
우	133-110	서울 성동구 강변북로 257	/
전화		/전송		/		/	부분공개(5,7)