투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품 기간 변경 의뢰(함평 성남초교)

『2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교) 관급자재 구매』에 소요되는 관급자재를 아래와 같이 납품 기간 변경요청 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 건    명 : 관급자재 납품 기간 변경 의뢰

2. 관 급 비 : 7,188,100원

3. 관급자재 내역

물품분류 번 호	품 명	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액	계약자	비 고
22478854	종합안내판	1600*800	개소	1	1,760,000	1,760,000	도시미
22712075	캠핑시설안내판	700*H1400	개소	3	1,000,000	1,350,000	아낌없이 주는나무
22712083	차량출입구표지판	500*300	개소	1	450,000	1,000,000	아낌없이주는나무
22890949	방향표지판	600*150	개소	4	500,000	2,000,000	아인디자인
22890946	텐트데크명패	300*120	개소	21	49,000	1,039,500	아인디자인
소 계					3,759,000	7,149,500
조달수수료			0.54%			38,600
합 계						7,188,100

4. 납품장소 : 함평 성남초교(변경없음)

5. 납품기한 변경

- 당 초 : 2016. 11. 25

- 변 경 : 2016. 12. 15.

붙  임 : 관급자재 납품기한 연기 검토 보고 1부.  끝.

	시설과장
주무관	김재희		시설팀장	임록화		시설과장	11/21 진병규
협조자
시행	시설과-6509	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33	/
전화	02)2181-1160	/전송	02)2181-1169	/	jh116@seoul.go.kr	/	대시민공개