문서번호	교량안전과-21200
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		강구조교량팀장	교량안전과장
최원혁		류봉현	11/21 박문희
협조

반포대교(잠수교) 보수공사

예비준공검사 실시 계획

2016. 11.

안전총괄본부

교량안전과

반포대교(잠수교) 보수공사

예비준공검사 실시 계획

「반포대교(잠수교) 보수공사」 준공 시기가 도래함에 따라 예비준공검사를 실시하여 준공 전 미흡한 사항을 사전에 보완코자 함

□ 근    거

○ 국토교통부고시 제 2015-473호(2015.6.30.)

- 건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침 제104조

(준공검사 등의 절차)

○ 부시장방침 제171호(2013.5.20.)

- 예비준공검사 이행실태 점검결과 개선대책 보고

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 반포대교(잠수교) 보수공사

○ 공사기간 : 2016.6.7. ~ 2016.12.3.

○ 공사내용 : 교면포장 31a, 신축이음보수 76m, 콘크리트 단면보수 231㎡ 등

○ 도 급 액 : 529,000천원

○ 도 급 자 : 한림토건 (대표:이현숙)

□ 예비준공검사 계획

○ 검사일시 : 2016.11.22.(화) 09:00~

- 검 사 자 : 강구조교량팀장 류봉현, 시설6급 김시련, 시설7급 최원혁

- 입 회 자 : 1종교량 보수‧보강공사 건설사업관리단 및 현장대리인

․ 책임건설사업관리기술자 : 석 영 관

․ 현장대리인 : 이 수 진

○ 검사방법

- 정산설계도서(설계변경 내역서, 도면, 검측내역 등) 적정 여부

- 시공상태 적정 여부

- 지급자재 사용 적정 여부

- 폐품 및 발생물의 유무 및 처리의 적정 여부 등

□ 향후계획

○ ’16.11.28. : 검사결과 보완조치 완료

○ ’16.12.03. : 공사 준공

붙임 : 예비준공검사조서(서식) 1부.  끝.