문서번호	시설보수과-6569
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	중랑물재생센터소장
차성민		윤승범	11/21 代한병연
협조
	주무관		최승룡

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

설계변경 및 준공정산 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

중랑물재생센터

(시설보수과)

『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』

설계변경 및 준공정산 보고

우리센터에서 시행중인 『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』 가

완료되어 아래와 같이 설계변경 및 준공정산을 시행하고자 합니다.

Ⅰ		공사현황

○ 공 사 명 : 서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사

○ 공사기간 : 2016.08.19 ~ 2016.11.30

○ 도 급 자 : 호곡종합건설(주) 대표 : 박성환

○ 도 급 비 : 84,515천원

○ 공사개요 : 투수블록설치 770㎡, 경계석설치 300m, 경계측구 300m

Ⅱ		보고내용

○ 설계변경사유 : 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종발생

○ 주요 설계변경 내용

공 종	규 격	단 위	수 량
			당 초	변 경	증ㆍ감
소형고압블록철거		㎡	540	774	증) 234
경계석설치	150*150*1000	m	200	438	증) 238
빗물받이설치	400*500	개소	9.00	6.00	감) 3.00
도로커팅		m	0.00	300	증) 300
이중벽관설치및부설	D=250	m	0.00	29.0	증) 29.0
인력비빔타설 무근구조물	fct=21Mpa	m	0.00	9.00	증) 9.00
급수탑보호덮개		식	0.00	1.00	증) 1.00
잔디식재	0.3*0.3	㎡	40.0	190	증) 150
관목이식	무궁화	주	120	0.00	감) 120

○ 설계변경 금액

구 분		당초 계약금액	변경 계약금액	증ㆍ감	비 고
총공사비		168,322,600	188,653,540	증) 20,330,940
도급비	공급가액	76,831,773	77,818,182	증) 986,409
	부가가치세	7,683,177	7,781,818	증) 98,641
	계	84,514,950	85,600,000	증) 1,085,050
관급자재비		83,807,650	103,053,540	증) 19,245,890	조달수수료포함

Ⅲ		조치계획

○ 상기 내용에 대하여 설계변경하고 정산코자 합니다.

붙임 :  1. 설계변경 사유서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.  끝.