문서번호	시설과-6480
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설과장
김재희		임록화	11/21 진병규
협조

『2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)』관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2016. 11.

동부공원녹지사업소

(시  설  과)

『2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

우리사업소에서 추진 중인「2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)」에 필요한 관급자재의 납품기한을 연기하여 공사추진에 만전을 기하고자 함

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 2016 가족자연체험시설 조성공사(함평 성남초교)

○ 공사기간 : 2016. 10. 06 ~ 12. 04

○ 도 급 액 : 금414,174,000원

○ 도 급 자 : 대한건설주식회사  대표 노영삼

□ 관급자재 현황

○ 구매 내역

물품분류 번 호	품 명	규 격	단 위	수량	단 가	금 액	계약자	비 고
22478854	종합안내판	1600*800	개소	1	1,760,000	1,760,000	도시미
22712075	캠핑시설 안내판	700*H1400	개소	3	1,000,000	1,350,000	아낌없이 주는나무
22712083	차량출입구 표지판	500*300	개소	1	450,000	1,000,000	아낌없이주는나무
22890949	방향표지판	600*150	개소	4	500,000	2,000,000	아인디자인
22890946	텐트데크명패	300*120	개소	21	49,000	1,039,500	아인디자인
소 계					3,759,000	7,149,500
조달수수료			0.54%			38,600
합 계						7,188,100

□ 검토내용

○ 연기사유  : 납품기한을 본 공사 진행 상황에 맞게 납품기한 연기

○ 납품기한 변경

- 당 초 : 2016. 11. 25

- 변 경 : 2016. 12. 15.

□ 처리의견

○ 계약부서(공원운영과)로 관급자재 납품기한 연기 요청하고자 함.  끝.