문서번호	도시철도토목부-14511
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	토목2과장		도시철도토목부장
한재호	문병종	방영복		11/21 김진팔
협 조
	설비계획과장		이명수
	건축공사과장		김내환
	시설전기과장		서태창

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사(8차1회)』

설계변경(물량 조정) 검토 보고

2016. 11

서울특별시 도시기반시설본부

도시철도토목부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	□	■

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사(8차1회)』

설계변경(물량 조정) 검토 보고

『지하철9호선 3단계 920공구 건설공사』와 관련 책임감리원으로부터 제8차1회에 대한 물량 조정 요청이 있어 이에 대한 검토 보고임

※ 벽산엔지니어링(주) 벽산(엔)S169EQA24-0027(2016.11.16.)

1		사업개요

□ 공 사 명 : 지하철9호선 3단계 920공구 건설공사

□ 공사개요 : 연장 1,390m

(본선터널 934m, 본선개착 291m, 정거장 1개소 165m)

□ 공 사 비 : 156.190백만원(8차 : 14,980백만원)

□ 공사기간 : `09.12.31 ~ `16.12.31(8차 : `16.06.16 ~ `16.12.31)

□ 시공회사 : 롯데건설(주) 외 1개사

□ 감 리 사 : 벽산엔지니어링(주) 외 3개사

2		추진경위

□ `16.06.16 : 8차공사 계약

□ `16.11.16 : 8차1회 설계변경 요청(시공사 → 감리단)

□ `16.11.16 : 8차1회 설계변경 요청(감리단 → 발주청)

3		보고내용

□ 8차1회 변경 현황

(단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증 감
공 사 비	14,980	14,980	변경없음
공사기간	`16.06.16~`16.12.31	`16.06.16~`16.12.31	변경없음

□ 변경사유

○ 환기구 중앙분리대 이전 설치사항 설계반영

○ 지하매설물로 인한 외부출입구 가시설 시공시 변경사항 설계반영

○ 건축,전기,기계분야 물량변경 설계반영

□ 변경내용

○ 공사비

(단위 ; 백만원)

구 분	금 액
	당 초	변 경	증 감
토 목	6,827	6,827	-
건 축	482	377	감 105
전 기	847	710	감 137
기계설비	1,465	1,774	증 309
제 경 비	3,534	3,498	감 88
물가변동(1~4회)	1,773	1,794	증 21
도급금액	14,980	14,980	-

○ 물량변경

구 분		당 초	변 경	증 감
토목분야	934정거장	토공 굴착 : 12,126㎥	토공 굴착 : 12,039㎥	감 87㎥
		구조물 타설 : 760㎥	구조물 타설 : 660㎥	감 100㎥
	본선환기구	토공 굴착 : 4,856㎥	토공 굴착 : 3,766㎥	감 1,090㎥
		H-PILE 근입 : 90본	H-PILE 근입 : 43본	감 47본
		구조물 타설 : 5,305㎥	구조물 타설 : 4,206㎥	감 1,099㎥
기타분야	건 축	조적공사 : 4,630㎡	조적공사 : 3,830㎡	감 800㎡
		금속공사(판넬틀 설치) : 1,000m	금속공사(판넬틀 설치) : - m	감 1,000m
		미장공사 : 1,500㎡	미장공사 : 1,000㎡	감 500㎡
	전 기	전선 및 케이블 : 31,882m	전선 및 케이블 : 27,161m	감 4,721m
		MCC 판넬 : - set	MCC 판넬 : 4.5set	증 4.5set
		분전반 : 6.6면	분전반 : 8.0면	증 1.4면
	기 계 설 비	공조배관 설치 : 723m	공조배관 설치 : 226m	감 497m
		공조덕트 설치 : 8,159㎡	공조덕트 설치 : 7,834㎡	감 325㎡
		승강설비 E/S : - 대	승강설비 E/S : 1.0대	증 1.0대
		본선환기구설비 공사 : - set	본선환기구설비 공사 : 0.8set	증 0.8set

4		책임감리원 검토의견

□ 지하매설물 위치가 당초 설계와 상이하여 현장 여건에 맞게 외부출입구 가시설 선형 변경사항 반영

□ 건축·기계·전기 분야 시공물량 조정 반영

□ 따라서, 상기 내용이 반영된 8차1회 설계변경은 적정하다고 판단됨

5		조치계획

□ 책임감리원 검토의견과 같이 8차공사에 대해 계약금액 변경없이 물량 조정하여 설계변경 처리코자 함.

붙 임 : 감리검토 의견서 1부. 끝.