투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	문화재 발굴(정밀)조사 용역 설계변경(정산) 시행 및 계약변경 의뢰(율곡로)

우리 본부에서 시행중인‘율곡로 창경궁 앞 상수도 인입관로 이설구간 문화재 발굴(정밀)조사 용역’완료에 따른 설계변경(정산)을 시행하고 다음과 같이 계약변경 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 율곡로 창경궁 앞 상수도 인입관로 이설구간 문화재 발굴(정밀)조사 용역

나. 계 약 액 : 58,818,000원

다. 계약기간 : 2016. 9.26.∼2016.11.25.

라. 계 약 자 : (재)한백문화재연구원 대표 박경식

마. 설계변경(정산) 내역

- 당초 : 58,818,000원    - 변경 : 49,927,000원  - 감)8,891,000원

바. 변경(정산)사유 : 발굴규모 축소 및 직접경비 정산

사. 예산과목 : (도시개발특별회계) 도로건설, 간선도로망 확충(도시개발특별), 율곡로(창경궁앞)구조개선, 시설비(401-01)

붙  임 : 1) 설계변경(정산) 검토보고서 1 부.

2) 변경 설계서(정산) 1 부.

3) 직접경비 정산서 1 부.

4) 감리 검토의견서 1 부.  끝.

	토목부장
주무관	한병찬		광역도로과장	진재섭		토목부장	11/21 김영수
협조자
시행	토목부-23866	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스빌딩 12층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2557	/전송	02-3708-2599	/	bchan1005@seoul.go.kr	/	부분공개(5)