문서번호	토목부-23877
결재일자	2016.11.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

						시 민
주무관	토목설계과장		토목부장		시설국장
김동수	여용석		김영수		11/21 형태경
협 조

설계 자문회의 개최

[올림픽대로 하부 미연결 도로 실시설계(1단계) 설계감리 용역]

2016. 11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	■	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	■	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	■	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

설계 자문회의 개최

서울특별시와 ‘롯데물산·롯데쇼핑·호텔롯데’와 ‘업무 협약’하여 시행 중인 ‘올림픽대로 하부 미연결 구간 도로개설사업 건설사업관리(설계감리) 용역(1단계)’ 에 대한 기술(설계)자문회의를 개최하고자 보고드림.

1		관련근거

〇 「건설기술진흥법」 제6조 및 같은 법 시행령 제16조

〇 「서울특별시 건설기술 심의 위원회 조례」제3조

2		용역개요

〇 용 역 명 : 올림픽대로 하부 미연결 구간 도로개설사업 건설사업관리(설계감리) 용역(1단계)

〇 사 업 명 : 올림픽대로 하부 미연결 구간 도로개설사업

〇 용역기간 : 2016. 7. 29. ~ 2016. 10. 31

〇 용역금액 : 181,500천원(롯데에서 부담)

〇 용 역 사 : ㈜신성엔지니어링

3		추진경위

〇 기(당초) 설계 추진

- ´05. 12. 15. : 잠실아파트지구 개발 기본계획(정비계획) 변경

- ´08. 10.~´09. 1. : 타당성 조사 및 기본계획(송파구)

- ´09. 7.~´10. 10. : 기본설계(도로계획과)

- ´10. 12.~´12. 2. : 실시설계 준공(토목부)

〇 보완설계 추진

- ´14. 10. 24. : 협약체결(서울시⇔롯데)

- ´15. 01. 22. : 보완설계 착수(도로계획과)

- ´15. 06.~12. : 파크리오아파트 주민 설명회 2회 개최(주민 반대로 무산)

- ´16. 08. 03. : 설계감리 착수(도로계획과)

- ´16. 08. 18. : 설계업무(1단계) 이관(도로계획과→토목부)

- ´16. 08. 29. : 사업비 조속 확정 요청(도로계획과→토목부)

- ´16. 10. 26. : 용역 준공 연기가능 통보(도로계획과→토목부)

- ´16. 10. 27. : 용역 준공 연기처리 요청(서울특별시→롯데물산)

〇 향후 추진 계획(보완설계)

- ´16. 12. 01. : 자문회의(서면) 실시

- ´17. 1월 중 : 용역 중간보고

- ´17. 3월 중 : 설계 VE 및 특정공법 심의

- ´17. 4월 중 : 건설기술심의

- ´17. 06. 30. : 사업 완료

4		자문회의(서면) 개최

〇 안    건 : 올림픽대로 하부 미연결 구간 도로개설사업 분야별 기술자문

〇 일    자 : 2016. 12. 1.(목)

〇 위 원 회 : 시설국장(위원장), 토목부장(부위원장), 토목설계과장(간사)

〇 위    원

구 분	분 야	소 속	직 책	성 명	연락처
위원장		도시기반시설본부	국장	형태경
부위원장		도시기반시설본부	부장	김영수
외부위원	교통	******	**	***	*************
	도로	******	**	***	************
	토목구조	********	***	***	************
	토목시공	*****	**	***	*************
	토질및기초	*******	**	***	************
내부위원	주관과	도로계획과	과장	하종현
	자치구	송파구(도로과)	과장	장형상

〇 자문방법 : 서면

붙임  1. 자문자료(별도송부) 1부.

2. 자문 검토 의견서(양식) 1부.  끝.