문서번호	방재시설부-18314
결재일자	2016.11.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		공원시설과장	방재시설부장
박계현		김인숙	11/21 임춘근
협 조
	주무관			윤석채

L형측구 정비에 대한 실정보고 검토

2016. 11.

도시기반시설본부

방재시설부

L형측구 정비에 대한 실정보고 검토 보고

『경춘선 폐선부지 공원조성공사』  보도부 다칼라 포장과 관련한 L형측구 정비에

대한 실정보고 검토 보고임.

▶ 선진경춘감-804(2016.11.18.) 『L형측구 정비 및 소파보수, 철거수량 증가에 대한 실정보고』

1		공사개요

○ 공 사 명 : 경춘선 폐선부지 공원조성공사(2단계)

○ 위    치 : 노원구 경춘철교 ~ 산업대3길 고가철교

○ 규    모 : 공원조성 연장(L) 1.1km, 면적(A) 53,860㎡

○ 사업기간 : ‘15.10.6 ~ ’17.6.30 (1차수 ‘15.10.6 ~ ’16.11.30)

○ 공 사 비 : 5,445백만원

2		실정보고 내용

○ 다칼라포장구간 설계 누락분 반영

① L형 측구 설치구간 포장절단 및 도로 소파보수 반영 (전구간)

· L형측구 거푸집 설치를 위하여 폭 20cm로 포장절단 후 틈보수 필요 (L=289m)

※ 당초 설계에는 도로 우수관 연결을 위한 포장 절단과 소파보수에 대해서만 반영

② 잣나무숲 뒤편 다칼라포장구간 경계석 및 L형측구 시공 반영

· 보도부 정비구간 경계석 및 L형측구 정비가 필요 (L=100m)

( 공릉지하차도, 하계지하차도 구간)

③ 공릉지하차도, 하계지하차도 상부 기존 보도블록 철거수량 추가 반영(A=213㎡)

○ 위치도

기존 보도 철거 후 다칼라 포장 구간

○ 공사비 검토                                                 (단위 : 천원)

공종명	규격	단위	공사비			비고
			당초	변경	증감
직접공사비			11,380	23,787	(증) 12,406
제경비			6,108	13,330	(증) 7,222
도급액			17,488	37,117	(증) 19,628

3		건설사업관리기술단 검토의견

○ 기존 보도 철거 후 다칼라 포장 시 L형측구 정비를 위해 L형측구 시공, 포장절단     및 틈보수가 필요하나 설계서상 누락된 사항이 있어 상기와 같이 반영함이 적정

하다고 판단됨.

4		보고자 의견

○ 공원 경계부 다칼라 포장 시 누락된 L형측구, 포장절단 및 틈보수에 대한 건설사업     관리기술단의 검토의견이 타당하여 승인 통보하여 설계변경 시 반영토록 조치코자 함.

붙 임 : 건설사업관리기술단 실정보고 1부.  끝.

<별 첨>

공사비 검토                                               (단위 : 천원)

구 분	공종명		규 격	단위	당 초		변 경		증 ․ △감		비고
					수 량	공사비	수 량	공사비	수 량	공사비
토목	토공	흙깍기		㎥	290	250	598	516	308	266
		토사소운반		㎥	-	-	308	1,351	308	1,351
	포장공	틈보수	T=12.5cm	㎡	-	-	140	3,625	140	3,625
		보차도 경계석		m	-	-	100	1,523	100	1,523
		L형측구		m	-	-	98	715	98	715	빗물 받이 제외
	철거공	보도포장 헐기		㎡	1,360	4,179	1,430	4,394	70	215
		아스콘 포장깨기		㎡	2,895	3,074	2,997	3,183	102	108
		보차도 경계석철거		m	1,052	1,174	1,152	1,286	100	112
		측구철거		m	1,052	2,229	1,152	2,441	100	212
		아스콘 포장절단		m	241	474	530	1,043	289	569
		보행안내원		인	-	-	46	3,710	46	3,710
직 접 공 사 비				식	-	11,380	-	23,787		12,406
제 경 비				식	-	6,108	-	13,330		7,222
도 급 액				식	-	17,488	-	37,117		19,628