함께 아낀 에너지, 함께 줄인 원전하나
	서울특별시
수신	서울시버스운송사업조합 이사장 귀하
(경유)
제목	가로변 정류소 개선공사 책임감리 주요업무수행 강조

1. 귀 조합의 노고에 감사드리며, 우리시에서 귀 조합에 위탁하여시행중인 가로변 정류소 개선공사 관련입니다.

2.현재 본 공사의 전면책임감리를 수행함에 있어 아래와 같이 주요업무 수행을  강조하니 감리자가 철저히 이행토록 하시기 바랍니다

- 아     래  -

가. 감리수행 주요업무(반드시 철저 이행필요)

①공사 주요공정별로 점검 철저(특히, 감리일지 기록 및 사진촬영 등)

-공장내에서 이루어지는 작업(자재검수, 도장 및 용접 샘플링 검사등)과 현장작업을 구분하여 상황에 맞는 감리업무 수행

② 공사비 정산이 예상되는 부분에 대하여는 시행여부,공사물량과 금액 확인(정확히 산출되어야함),사진촬영 등 증빙서류 확보철저

-관로굴착 길이(cm단위 정확도), 굴착폭(cm단위 정확도), 다짐기 사용여부 등 (특히, 굴착길이가 길 경우 군데군데 사진촬영을 많이할 것)

※ 굴착량 증가에 따라 공사비 증액이 될수 있으므로 철저확인 필요.

-승차대앞 시각장애인용 점자블럭 설치공사 물량 및 작업과정 등을 정확히 확인

※ 2014.3.20.현재 기준, 추가 공사비 산정내용을 작성하여 제출요

③ 승차대 공사와 관로공사 공정불일치 최소화조치 및 전기인입철저

-보도굴착 승인과 심의로 인해  공정이 불일치하고 있는 실정이므로,가급적 2개 공정간 격차가 최소화 되도록 공정관리 철저

-승차대 설치된곳에 전기인입이 안되는 곳이 없도록 공사관리, 전기인입거리가 너무 멀거나 보도여건상 전기인입이 불가한 곳은 가로등 전기사용 적극 협의하는 등 모든 방안강구.(근거 공문 확보요)

그럼에도 불구하고 전기인입이 불가인 곳은 우리시의 승인없이 승차대 설치를 자제할 것.

④ 지장물로 승차대 설치 못한 곳은 설치불가 증빙자료 확보철저(향후 민원인,지역대표에게 충분한 이해설득이 필요함)

⑤ 승차대 및 표지판 설치 가이드라인 이행여부 확인 철저.

⑥ 기존 승차대설치후 지장물로 인해 신규설치 못할 경우 항의민원을 고려, 지장물확인 철저(지장물로 설치곤란이 확실할 경우 기존 승차대 존치 검토)

지장물 발견 등 승차대 설치여건이 곤란한 상황 등으로 기술적인 검토 필요시 비상주감리원 적극 참여로 대안을 조속히 마련하여 시행

⑦ 거의 동일한 여건(보도폭,버스노선,이용자수)일 경우 동일 타입의 승차대가 설치되도록 적극 노력(여건이 비슷한데 승차대 타입이 다르다는 민원이 있음)

⑧ 점검리스트, 감리일보, 사진촬영, 회의 및 지시자료 등을 감리월보에 정리하는 등 감리월보 작성 및 보고에 철저

-경미한 사항 등으로 감리단 검토를 거쳐 변경된 사항이 있을 경우 도면 등에 반영 및 사업시행기관에 보고철저

⑨ 성실시공,원활한 공사진행 등 성공적인 공사를 위해 필요한 기타 감리업무 수행 철저. 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	손창익		가로변정류소개선팀장	김송		버스정책과장	03/17 신종우
협조자
시행	버스정책과-5094	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15 서울시청 별관 1동 7층	/
전화	2133-2292	/전송	2133-1049	/		/	대시민공개
정보의 개방과 공유로 일자리는 늘고 생활은 편리해집니다