투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신자	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제 목	서울대공원 노후동물사 기계설비 개선공사 설계변경 의뢰(최종)

1. 시설과–7134호(2016.10.26.) 및 시설과-7746(2016.11.18.)호와 관련입니다.

2. 『서울대공원 노후동물사 기계설비 개선공사』와 관련하여 설계변경 및 준공정산을 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 노후동물사 기계설비 개선공사

나. 도급금액 : **************

다. 공사기간 : 2016. 8. 22. ~ 2016. 11. 29.

라. 계약업체 : ㈜삼천리이엔지 대표 정희돈

마. 설계변경내용

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	비 고 (증 · 감)
공사금액	***********	***********	***********

바. 사    유

- 신규 물량 발생과 기존 물량 증․감에 따른 공사금액 변경

- 제경비 정산에 따른 공사금액 변경

사. 예산과목

- 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 동물사관리기능및야생동물종보존, 공원안전시설보수및정비, 시설비

붙임  1. 관련공문 2부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의각서 1부.  끝.

	서울대공원장
주무관	박도원		주무관	조대복		계약1팀장	조현		시설과장	11/22 代이춘한
협조자
시행	시설과-7834	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)