문서번호	급수운영과-29439
결재일자	2016.11.22.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
윤승구		11/22 오기석
협조

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

(*******************************)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

동부수도사업소

(급수운영과)

설계변경 심의 위원회 개최 결과보고

(*******************************)

우리사업소에서 시행중인『*******************************』에 대한 설계변경 사전 심의 위원회를 개최하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1				공사현황

가. 공 사 명 : *******************************

나. 공사개요 : D=20~300mm, L=2,188m

다. 계 약 자 : ㈜형제이형관 대표 김동용

라. 공사기간 : 2016. 4. 22. ~ 2016. 11. 26.

마. 계약금액 변경내역

구 분	당초(원)	변경(원)	증·감	비 고
****	586,845,455	611,200,000	증)24,354,545
******	58,684,545	61,120,000	증) 2,435,455
*****	645,530,000	672,320,000	증)26,790,000

2				심의 위원회 개최사항

가. 개최일자 : 2016. 11. 22(화) 13:30

나. 개최장소 : 3층 회의실

다. 참석위원 : 급수운영과장 외 6명

라. 검토내용

- 신규공종 및 시공물량 증·감에 따른 설계변경 적정성 검토

마. 검토결과 : 위 검토내용에 대하여 적정하다는 심의의견을 제시함.

3				향후계획

가. 위와 같이 설계변경 심의 위원회 개최결과 심의위원 모두 설계변경이적정하다고 의견을 제시하였으므로, 이를 설계변경 내역에 반영하여 본청 재무과에 변경계약 의뢰하고자 합니다.

붙 임 : 1) 설계변경 심의 의뢰서 1부.

2) 설계변경 사전심의 의결서 1부.

3) 설계변경 내역서 1부. 끝.