설계변경 심의 의견서

부분공개(5)

○ 공사명 : 거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관 정비공사

신청 부서명	강동수도사업소 급수운영과
공사 감독원	지방시설주사보 조봉구
제출 년월일	2016. 11. 22.

□ 심의 위원회 의견

- 심의일시 : 2016. 11. 22.(화) 13:00

- 심의의견 : 설계변경에 따른 심의 결과에 대하여 아래와 같이	의견 제시함

위   원

직  위

성  명

서  명

의  견

위 원 장

급수운영과장

전명수

11/22

전명수

적정함

위    원

주무관

송종범

송종범

적정함

위    원

주무관

김효수

김효수

적정함

위    원

★주무관

김용현

김용현

적정함

위    원

주무관

한호진

한호진

적정함

위    원

주무관

임인택

임인택

적정함

담    당

주무관

조봉구

조봉구

설계변경 사유서

□ 공사 현황

가. 공 사 명 : 거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : 관부설 D=20~400mm, L= 1409m

다. 공사기간 : 2016. 5. 2 ~ 2016. 11. 28

라. 도 급 비 : 당초 – 410,332,880원

변경 – 432,470,000원(증 22,137,120)

마. 계약상대자 : ㈜가가설비 대표 이성주

□ 설계변경 사유 및 주요 내용

가. 분기부 공종변경(주간→야간)

▷ 관련근거 : 급수운영과-11935(2016.6.28.), 공사감독2처-5734호(16.06.13)

▷ 내    용 : 1구간 분기부(300/300) 위치에 교통상황을 고려하여 주간에서 야간으로 변경시공.

나. 포장도로 종류변경(아스팔트 도로→아스팔트 콘크리트 도로)

▷ 관련근거 : 급수운영과-11935(2016.6.28.), 공사감독2처-6483(16.06.23)

▷ 내    용 : 1구간 중 당초 아스팔트도로로 설계되었으나 일부구간(L=40m)이 아스팔트 콘크리트 도로로 확인되어 폐기물이 증가함.

다. 밸브 및 철개 재사용 불가

▷ 관련근거 : 급수운영과-15330(2016.8.10.),공사감독2처-9307(16.08.08)

▷ 내    용 : 1구간 부설중 분기밸브를 철거 후 재사용하게 되어 있으나 단수범위가 광범위하여 철거 후 재사용이 불가하며, 당초 철개가 재사용하게 되어 있으나 노후되어 안전사고의 위험이 있어 재사용이 불가함.

라. 품질시험 실시

▷ 관련근거 : 급수운영과-18364(2016.9.29.), 공사감독2처-10236(18.08.22)

▷ 내     용 : 2구간 분기부(1,000/300) 및 3구간 기존관 연결부(D=400mm)에 강관용접 작업에 대하여 자분탐상검사를 실시함.

마. 포장도로 종류변경, 밸브추가(D=300mm) 및 환토 미실시

▷ 관련근거 : 급수운영과-18364(2016.9.29.), 공사감독2처-12041(16.09.22)

▷ 내     용

- 1구간 중 당초 아스팔트도로로 설계되었으나 일부구간(D=150mm구간)이 아스팔트 콘크리트 도로로 확인되어 폐기물이 증가함.

- 부단수 분기(500/300)작업 중 도시가스 등 지장물로 인하여 밸브를 추가 사용함.

- 1구간 중 굴착토사가 양질로 확인되어 미환토 시공함.

바. 지장물로 인한 확폭 및 이탈방지압륜접합공(D=400mm,야간) 증가

▷ 관련근거 : 공사감독2처-16004(16.11.17)

▷ 내    용 : 3구간 관부설 중 통신 및 전력선 등 지장물로 인하여 굴착폭이 확대되고 이탈방지압륜접합공(D=400mm,야간)과 이형관 부설공(D=400mm,야간)이 증가함.

사. 실시공 (주요)수량 정산 내용

공종명	규 격	단위	수 량		비고(증,감)
			계 약	변 경
부 설 공	D20~400mm	m	1,424	1,409	감) 15m
KP이탈방지압륜 접합공	D400, 야간	개소	91	163	증) 72개소
주철(이형관) 부설공	D400, 야간	개소	89	116	증) 27개소

아. 건강 및 노인장기요양보험료, 연금, 퇴직공제부금 실납부 금액 정산 반영

□ 공사비 변경

(단위:원)

구 분	계 약 금 액	변 경 금 액	증·감	비 고
도 급 비	410,332,880	432,470,000	증) 22,137,120
공급가액	373,029,891	393,154,546	증) 20,124,655
부가가치세	37,302,989	39,315,454	증) 2,012,465

붙임 : 설계변경 내역서 1부.  끝.