투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	성동도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	2016년 노후포장도로 정비공사(1구역) 준공기한 연기 의뢰

우리과에서 추진중인 「2016년 노후포장도로 정비공사(1구역)」의 당초 공사기간내 준공이 불가하여 부득이 준공기한을 연기하고자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 공 사 명 : 2015년 노후포장도로 정비공사(1구역)

○ 계약금액 : 금1,047,222,000원

○ 공사기간 : 2016. 4. 25 ~ 2016. 11. 30

○ 공사규모 : 일반아스팔트포장 1,764a, 재생아스팔트포장 382a

○ 도급업체 : ㈜길포토건  대표 김정희

○ 준공기한 연기사유

- 아스콘포장 관리시험 및 서울품질시험소 코아시험의뢰 등에 대한 절대공기 부족

○ 준공기한 연기 : 당초 2016. 11. 30 → 변경 2016. 12. 30

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

- 귀책사유 : 성동도로사업소

	서울특별시 성동도로사업소장
주무관	김용면		도로보수과장	11/22 이상호
협조자	계약1팀장	조현
시행	도로보수과-5822	(		)	접수		(		)
우	04807	서울특별시 성동구 자동차시장길 41 (용답동) 성동도로사업소 도로보수과	/
전화	2210-1566	/전송	02)2210-1549	/		/	대시민공개