문서번호	지역경제과-39026
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		유통관리팀장		지역경제과장		기획재정국장
유민		김평선		심수택		11/22 김종순
협조	기획예산과장		이윤영
	감사담당관		정종근
	재무과장		김성철
	예산팀장		이정희		★계약팀장		김종수

★ ◉

- 뚝도활어시장 공동유통센터 조성을 위한 - 공동작업장 설치 계획

2016.  11.

성  동  구

(지 역 경 제 과)

사 전  검 토 사 항

::: 해당사항에 ☑ 표시하시기 바랍니다.
항 목		검 토 여 부
사업구분		신규사업 ☑ 공약(약속)사업 □ 계속사업 □ 인센티브/공모사업 □
소통분야 고려사항		●	구민		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	전문가		:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	이해당사자		:		유 ☑ ( 뚝도시장 상인회 ) 무 □
여성친화 도시		성 평 등 □ 안 전·편 의 □ 가 족 · 공 동 체 회 복 □ 여 성 참 여 □
기타 고려사항		일 자 리 ☑ 환경영향 □ 안 전 □ 유지비용 □ 바른 공공언어 ☑
		성 인 지 □ 취약계층 □ 장 애 인 □ 디 자 인 □ 갈등발생 요인 □
타자원 활용		●	중앙부처	:		유 ☑ ( ) 무 □
		●	서울시	:		유 ☑ ( ) 무 □
		●	기업	:		유 □ ( ) 무 ☑
		●	민간단체	:		유 □ ( ) 무 ☑
언론홍보 계획		기획보도 □ 보도자료 □ SDTV □ 성동뉴스레터 □ 성동구소식지 □
		기 고 문 □ 전자행정서비스 □ S N S □ 기타 (리플릿 등) □ 없 음 ☑
	● 홍 보 제 목 :
	● 중점 홍보사항 - -
	※ 우리 구만의 차별화된 사업내역과 중점 부각하여 홍보할 사항을 중심으로 ‘홍보제목’을 선정하여 간결하게 기재하시기 바랍니다.

- 뚝도활어시장 공동유통센터 조성을 위한 -

공동작업장 설치 계획

	아라뱃길과 한강을 활용한 수산물 특화시장인 뚝도활어시장 조성을 위하여 뚝도시장 내 자연산 수산물을 선별, 가공, 포장, 배송할 수 있는 공동 작업장을 설치하고자 함

Ⅰ				추 진 근 거

전통시장 및 상점가 육성을 위한 특별법 제19조의7(상권활성화 지원)

「100% 자연산 」뚝도 활어시장 조성 기본계획【구청장 방침 제180호, 2016.4.29.】

전통시장 공동시설 설치 사업계획(市소상공인지원과-14440, ’16. 10. 12.)

Ⅱ				사 업 개 요

건    명: 뚝도활어시장 조성을 위한 공동작업장 설치

기    간: '16. 11.∼'17. 1.

위    치: 성동구 성수동2가 335-120 (성덕정 15길 4)

규    모: 13.22㎡(4평 규모), 1층 점포

내    용: 공동작업장 인테리어 공사, 이동식 수족관 제조·구매 등

총 사업비: 92,300천 원

Ⅲ				주 요 경 과

공유재산심의회 개최: ’16. 9. 29.

임대차 계약 체결일: ’16. 10. 11. (임차기간: '16. 10. 15.~'18. 10. 14.)

※보증금 10,000천 원 / 월세: 월 500천 원

Ⅳ				추 진 계 획

추진내역

구 분	내 용	계약기간
인테리어 공사	가설 및 철거공사, 목 공사, 전면 및 금속/유리공사, 도장공사 등	15일
전기공사	작업장 전기공사	10일
이동식 수족관 제조·구매	냉각기, 여과기, 공기순환기 포함 (1,200×800×1,180)×6개	10일
물품 구입	사무기기, 책상, 의자, 사무용품 등	7일

리모델링 공사

평 면 도
외부 정면도	내부 측면도

계약방법                                         (단위: 원)

구 분	계약방법		금 액
인테리어 공사	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호(여성기업)	45,120,000
전기공사	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호	4,180,000
이동식 수족관 제조, 구매	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호	21,000,000
물품구입	수의계약	지방계약법 시행령 제30조제1항제2호	22,000,000

Ⅴ				소 요 예 산

소요예산: 92,300천 원

예산과목

○ (사고이월)지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 뚝도활어시장 조성지원(보조), 자산취득비, 자산및물품취득비(405-01):21,000천 원

※ 뚝도활어시장 공동판매장(활어 직판장) 수족관 제조, 구매 계약체결 후 낙찰차액 사용

○ 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 뚝도활어시장 조성지원(보조), 자산취득비, 자산및물품취득비(405-01):22,000천 원

○ 지역경제과, 지역경제육성, 전통시장 활성화 및 소비자보호, 뚝도활어시장

조성지원(보조), 시설비 및 부대비, 시설비 (401-01):49,300천 원

Ⅵ				행 정 사 항

협조사항

○ 계약심사	---------------	감사담당관
○ 낙찰차액 사용 협조	---------------	기획예산과
○ 계약체결	---------------	재 무 과

추진일정

○ 계약심사 요청	---------------	'16. 11.
○ 계약 의뢰	---------------	'16. 11. 30.까지
○ 착공(수) 및 준공(완료)	---------------	'16. 11.∼12.
○ 물품 구입	---------------	'17. 1월

.끝.