문서번호	토목부-23929
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	광역도로과장	토목부장
이한규	진재섭	11/22 김영수

가시설 삭제 및 암파쇄방호시설 실 시공물량으로 정산 시행보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

2016.11.

도시기반시설본부

(토 목 부)

가시설 삭제 및 암파쇄방호시설 실 시공물량으로 정산 시행 보고

(선사로 ~ 고덕지구간 도로확장공사)

고덕산 구간 도로종단 인하 계획에 따라 가시설을 설치토록 설계되어 있었으나, 교통전환시 공사방법 변경(안식각 확보) 하여 가시설은 제외하고 암파쇄방호시설로 대체 및 기타 발파암 구간에 대하여 실 시공 물량으로 정산 시행 보고

공사개요

○ 위    치 : 강동구 암사동 440-1 ~ 고덕동 165-11(아리수로)

○ 사업규모 : 아리수로 도로확장 3.7km, 폭 2차로 → 4차~6차로

○ 사업기간 : 2009. 1. 6. ~ 2016.12.31.

○ 총사업비 : 146,077백만원 (도급액 : 38,876백만원)

○ 시 공 사 : ㈜대저건설외 1사

검 토

○ 고덕산 도로종단 인하(H=8.0m) 구간 가시설 설치로 계획되어 있었으나, 사면경사를 자연 안식각을 확보하는 방법으로 변경시공하여   설치비 삭제 필요

○ 4차로 확장 최초설계서(2008.11.) 및 6차로 추가 확장구간 암파쇄방호시설 설치 및 철거 물량 정산 반영

○ 암파쇄방호시설 설계서상 천공길이 오류 및 누락 정정(천공길이336m 증가)

○ 수량 변경 현황

공종	규격	단위	수량			비고
			당초	변경	증․감
무근콘크리트 깨기	T=30cm미만	㎥	224	198	-26	기계약단가
암파쇄방호시설	H=3m, 4m, 6m	m	1,400	1,400	0	기계약단가
천 공	토사, 리핑, 발파	m	1,245	1,581	336	기계약단가
토류판 설치 및 어스앵커		m	345	-	-345	기계약단가
관급자재(레미콘)	25-180-08	㎥	228	202	-26	기계약단가
폐콘크리트 운반 및 처리		TON	514	456	-58	기계약단가

공사비 증·감

(단위:천원)

구 분	단위	당 초	변 경	증․감	비고
직접공사비	1식	979,456	421,919	-557,537
제 경 비	1식	226,244	90,781	-135,463
공사원가	1식	1,205,700	512,700	-693,000
부가가치세	1식	120,570	51,270	-69,300
도급공사비	1식	1,326,270	563,970	-762,300
관급자재	1식	13,000	11,500	-1,500
폐기물처리비	1식	8,580	7,590	-990
총공사비	1식	1,347,850	583,060	-764,790

감리단 검토의견

○ 고덕산 종단 인하구간 미시공된 가시설을 삭제하고, 4차로 및 6차로 추가 확장구간 암파쇄방호시설 설치·철거 정산내역을 설계에 반영함이 타당하다고 사료됨.

※  ‘공사계약 일반조건 제6절 공사 설계의 변경 5. 발주기관의 필요에 의한 설계변경’을 근거로 설계변경 하고자 하며, 실정보고 서류 검토결과 내역서, 수량산출서, 도면 등이 설계도서 작성 제반기준에 맞게 작성됨.

조치계획

○ 실 시공뭉량으로 정산 실정보고 한 사항에 대하여 감리단 검토의견과 같이 정산 반영이 반영이 필요함.

○ 감액되는 공사비 764,790천원에 대하여는 추후 설계변경 소심의위원회 심의결과에 따라에 반영하고자 함.

붙 임 : 감리단 검토의견서 1부.  끝.