“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신자	재무과장
(경유)
제 목	설계변경시행 및 계약의뢰(2016년도 청사 기계설비 유지보수 연간단가)

1.  『2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)』에 대하여 아래와 같이 설계변경을 시행코자 하오니, 계약에 반영하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2016년도 청사 기계설비 유지보수공사(연간단가)

나. 계약업체 : ㈜금정엔지니어링,  대표 박종화

다. 계약기간 : 2016.2.12. ~ 2016.12.31

라. 변경사유 : 계약 물량조정 및 금액변경

마. 변경금액 : 금349,514,000원(증129,284,150원)

구 분		금 액(원)			비고
		당초	변경	증감액
총 공사비		220,229,850	349,514,000	129,284,150
도급비	공급가액	200,208,955	317,740,000	117,531,045
	부가가치세	20,020,895	31,774,000	11,753,105
	계	220,229,850	349,514,000	129,284,150

바. 예산과목 : 행정국총무과, 행정지원체계강화, 효율적인 행정지원체계 확립,

청사관리, 쾌적하고 안전한 청사관리, 공공운영비

붙임  1. 보고서      1부

2. 변경내역서  1부.

3. 합의서      1부. 끝.

	총무과장
★주무관	채충일		시설관리팀장	임철수		총무과장	11/22 정상택
협조자
시행	총무과-40101	(		)	접수		(		)
우	04524	서울시 중구 세종대로 110 서울시청 총무과 7층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	(02)2133-5654	/전송	(02)2133-0771	/	kkim102777@seoul.go.kr	/	부분공개(5)