투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	관리과장
(경유)
제 목	『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』 설계변경 시행 및 변경계약 의뢰

1. 우리 센터에서 시행 중인 『서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사』에 대하여 다음과 같이 설계변경 및 변경계약을 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 서문~게스트하우스 간 도로정비 및 휀스 설치공사

나. 도 급 자 : 호곡종합건설㈜ 대표 박성환

다. 공사기간 : 2016 08. 19 ~ 2016. 11. 30

라. 설계변경 내역

(단위 : 원)

구 분		당 초	변 경	증 ․ 감	비 고
총 용 역 비		168,322,600	188,653,540	중) 20,330,940
도급비	공 급 가 액	76,831,773	77,818,182	증) 986,409
	부가가치세	7,683,177	7,781,818	증) 98,641
	계	84,514,950	85,600,000	증) 1,085,050
관급자재비		83,807,650	103,053,540	증) 19,245,890	조달수수료 포 함

마. 설계변경 사유 : 계약물량 증ㆍ감 및 신규공종발생

바. 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터

공통분야유지보수, 시설비 및 부대비, 시설비

따로붙임 :  1) 방침서 1부.

2) 설계변경 사유서 및 합의서 1부

3) 변경 내역서 1부.  끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	차성민		시설보수과장	윤승범		중랑물재생센터소장	11/22 代한병연
협조자	주무관	최승룡		관리과장	한병연
시행	시설보수과-6610	(		)	접수		(		)
우	04809	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64 중랑물재생센터	/	www.seoul.go.kr
전화	02-2211-2555	/전송	02-2211-2579	/	csm0528@seoul.go.kr	/	대시민공개