투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	서 울 특 별 시 장(재무과장)
(경유)
제목	제4회 설계변경 시행(2016년 포장도로 긴급복구공사)

1. 우리사업소에서 시행중인 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)에 대한 설계변경을(4회) 아래와 같이 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 2016년 포장도로 긴급복구공사(연간단가)

나. 공사기간 : ‘16.02.19 ~ ‘16.12.31

다. 공사개요 : 절삭후 덧씌우기 361a, 소파 포장복구 32a

라. 도 급 자 : 금보씨앤씨(주)  박성용

마. 변경사유 : 단순물량 증.감

바. 변경내역                                             (단위: 원)

구 분		당 초	변 경	증, 감	비 고
도급비	공급가액	1,436,432,537	1,835,910,000	증)399,477,463
	부가세	143,643,253	183,591,000	증) 39,947,747
	계	1,580,075,790	2,019,501,000	증)439,425,210

사. 예산과목  :  도로시설물관리, 도로및도로부속물관리(도시개발), 노후포장도로정비공사, 시설비 및 부대비, 시설비

붙  임  1. 2016년 포장도로 긴급복구공사 설계변경 검토보고 1부.

2. 설계변경 내역서 1부

3. 합의각서 1부  끝.

	서울특별시 강서도로사업소장
★주무관	천석기		도로보수과장	김권일		강서도로사업소장	11/22 김용제
협조자	관리단속과장	이희천		계약1팀장	조현
시행	도로보수과-11916	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2657-7941	/전송	02-2657-7960	/		/	대시민공개