문서번호	토목부-23990
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	토목설계과장	토목부장		시설국장
정문수	여용석	김영수		전결 11/22 형태경
협 조

설계용역 준공기한 연기 보고

(양재대로 지하차도 기본 및 실시설계)

2016.11.

도시기반시설본부

( 토 목 부 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

설계용역 준공기한 연기 보고

(양재대로 지하차도 기본 및 실시설계)

현재 용역 수행 중인 『양재대로 지하차도 기본 및 실시설계 』용역의 지하차도 종단 조정 등을 위한 준공기한 연기 보고임.

※ 준공기한 : 당초)2016.11.30. → 변경)2017. 2.28.(증3개월)

▢ 용역 개요

◦ 용 역 명 : 양재대로 지하차도 설치 기본 및 실시설계용역

◦ 위    치 : 강남구 구룡마을입구 교차로~일원터널 교차로(양재대로)

◦ 용역내용 : 전체 연장 2,700m

- 양재대로 지하차도 : 폭20.0m(4차로), 연장1,174m (Box800m, U-Type374m)

- 토공구간 : 폭36.6~43.1m(8~10차로), 연장1,056m

- 일원지하차도 종단개선 : 폭6차로→4차로, 연장470m (BOX190m, U-Type280m)

◦ 용역기간 : 2013. 7. 8. ~ 2016.11.30.

◦ 용 역 비 : 1,920,538,000원

◦ 용 역 사 : ㈜동일기술공사, ㈜제일엔지니어링종합건축사사무소, ㈜진우엔지니어링

▢ 근 거 : 동일(구조) 제16-3080호(2016.11.22)로 과업기간 연장 요청

▢ 추진현황 (공정률 : 77.7%)

◦ '04. 8. ~ '06. 2.  : 기본 및 실시설계용역 시행

◦ '09. 7.30. : 강남순환도시고속도로(8공구) 주민설명회(공사 사전설명)

◦ '09. 9.21. : 청원서 접수(김재희 외 5,522명, 소개 김현기 시의원)

◦ '10. 3. ∼ '12. 2. : 양재대로 지하화 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

◦ '12.10.30. : 투자심사 완료

◦ '13. 7. 5. : 기본 및 실시설계 용역 착수

◦ '14. 7.30. : 주민설명회

◦ '15. 7.24. : 기본설계 완료

◦ '16.11.현재 : 실시설계 중 (설계자문 등)

▢ 보고내용

가. 용역비 및 용역기간 내역

(단위 : 원)

구 분	당 초	변 경	증 / 감	비 고
용 역 비	1,920,538,000	1,920,538,000	-	변경없음
용역기간	′13. 7. 8.~′16.11.30.	′13. 7. 8.~′17. 2.28.	증)3개월

나. 준공기한 연기 사유

◦ 기본설계 변경사항(지하차도 연장 증가)에 대하여 설계자문을 통하여 시행방안 확정 후 실시설계 수행을 위한 설계기간 부족

- 구룡마을 도시개발사업의 배수계획 등을 반영한 지하차도 종단 경사 완화(시점부 종단 선형 4.98% → 3.40%)

- 시점부 상습침수구역 해소를 위한 지하차도 연장 (L=1,160m → 1,174m) 조정

- 소음분석 결과에 의한 소음대책(방음터널 → 반방음터널) 조정으로 방재등급 조정(2등급 → 3등급)에 따른 방재시설 설치 방안 변경 등

◦ 설계자문, 공법심의, 설계VE, 교통소통대책 등 행정 절차 이행

다. 지체상금 부과여부 : 미부과

▢ 조치의견

◦ 상기와 같이 지하차도 종단 조정 등 기본설계 변경사항에 대한 설계 품질 확보를 위하여 설계용역의 준공기한을 연기하여 용역 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

▢ 향후계획

◦ '16.11. : 설계자문회의

◦ '16.12. : 설계VE

◦ '17. 2. : 설계 완료

붙임 : 1. 준공기한 연기 요청 공문 1부.

2. 예정공정표(변경) 1부.  끝.