투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울대공원
수신	시설과장
(경유)
제목	[변경계약 체결통보] -서울대공원 복돌이동산 가족형 스포트 테마파크 조성공사

1. 시설과-7702(2016.11.17)호와 관련입니다.

2. 귀 부서에서 의뢰한 공사(용역) 준공기한 연기건에 대하여 아래와 같이(변경)계약 체결하였음을 알려드리니 업무에 참고하시기 바랍니다.

◎ 계약체결 현황(변경)

(단위 : 원)

사 업 명	계약자 (대표)	변경사항	변경 계약 주요내용
울대공원 복돌이동산 가족형 스포트 테마파크 조성공사	㈜필드원종합건설 ********** 외5개사	공사기간 변경	[복돌이초소 이전 및 추가예산배정 지연에 따른 절대공기 부족으로] 2015.12.17.~2016.11.20 을 → 2015.12.17.~2016.12.30. 로 변경

따로붙임  공사변경계약서 1부. 끝.

	총무과장
주무관	정한성		총무과장	11/22 이행용
협조자
시행	총무과-13867	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr/
전화	02)500-7230	/전송	02)500-7991	/	hshs90@seoul.go.kr	/	부분공개(6 7)