문서번호	설비부-18101
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	건축설비과장	설비부장
이강욱	김영수	11/22 권오식

「장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 공사(엘리베이터, 전열교환기 구매)」

관급자재 변경 검토 보고

2016. 11.

「장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 공사(엘리베이터, 전열교환기 구매)」

관급자재 변경 검토 보고

『장안평 자동차산업 종합정보센터 건립 공사』관련, BF심의결과 건축 구조가 변경됨에 따라 기 계약된 엘리베이터 계약해지 후 품목추가 재계약 및 전열교환기 품목 추가 구매 등에 대한 검토 보고임.

관급자재 개요

□ 계약금액 : 금75,349,620원(3자단가)

- 엘리베이터 : 금50,562,200원

- 전열교환기 : 금24,787,420원

□ 계약업체

- 엘리베이터 : ㈜금영제너럴  대표 이금기

- 전열교환기 : 엘지전자(주)  대표 정도현

□ 납품기한 : 2017.06.30

□ 예산과목 : 도시기능회복및활성화,도시환경정비및체비지관리등(도시개발),자동차산업종합정보센터조성,시설비.

변경사항

(단위 : 원)

품목		계약금액			계약기간		납품요구번호	계약번호
		변경전	변경후	증,감	변경전	변경후
엘리베이터	품대	50,562,200	53,287,205	2,725,005	‘16.6.30	‘16.6.30	12-16-2-48106-00	00156146900
	조달수수료	259,380	287,481	28,101
	소계	50,821,580	53,524,686	2,753,106
전열교환기	품대	24,787,420	24,954,000	166,580	‘16.6.30	‘16.6.30	12-16-2-48132-00	00168140700
	조달수수료	133,850	134,752	900
	소계	24,921,270	25,088,752	167,480
합계		75,742,850	78,613,438	2,920,586

□ 금액변경 사유

- 관련근거 : 건축부-16009(2016.11.18.)「건축공사 실정보고 승인처리 알림」

∘장애물 없는 생활환경 인증제도 심의결과에 따른 건축구조 변경

□ 계약해지 사유

- 층 추가 항목은 별도의 고유식별번호 없어 변경계약 불가

조치의견

□ 엘리베이터 계약해지후 재계약 의뢰 및 전열교환기 추가 구매 내용을 계약부서인 건설총괄부에 계약변경 의뢰코자 함.

붙임 : 1. 관련 공문서 1부.

2. 계약해지 동의서 1부(엘리비에터).

3. 설계도서 각 1부(엘리베이터,전열교환기).   끝.