문서번호	치수과-4106
결재일자	2016.11.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		치수과장	시설부장
방호익		신용철	11/22 박상돈
협 조

건설폐기물처리용역 수량 변경보고

(한강공원 나들목 증설공사)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

한강공원 나들목 증설공사 건설폐기물 처리용역 수량 변경 보고

한강공원 나들목 증설공사(신청담) 및 ‘15년(개화나들목개선공사, 한강공원 접근시설 유지보수공사)에서 발생된 폐기물 물량 변동 사항을 검토 보고 함.

Ⅰ		용 역 개 요

◦ 용 역 명 : 한강공원 나들목 증설공사 건설폐기물처리용역

◦ 용역규모 : 폐콘크리트 : 6,516ton, 폐아스콘 : 2,836ton

◦ 용역기간 : 2013. 5. 31. ～ 2016. 12. 31.

◦ 용 역 비 : 158,600천원

◦ 용역업체 : ㈜ 흥진환경

Ⅱ		보 고 내 용

◦ 폐기물 추가 발생 공사 현황

- 개화나들목 개선공사 : 424ton(콘크리트 387톤, 아스콘 37톤)

· 개화나들목 개선공사는 ‘15.10.28 시행중에 있으나, 한강관광자원화 사업비       교부(8월말) 지연으로 폐기물처리 용역 미발주로 시행중인 한강공원 나들목       증설공사 건설폐기물처리용역업체에 포함하여 처리함

- 한강공원 접근시설 유지보수공사 : 324(콘크리트 : 235톤, 아스콘 89톤)

· 한강공원 접근시설 유지보수공사(연간단가)는 폐기물 수량이 평균          100톤 미만으로 분리발주 제외대상이나, ‘16년 경사로 계단철거 등으로        폐기물량 초과분 발생으로 공사의 시급성을 감안하여 한강공원 나들목         증설공사 건설폐기물처리용역체에 포함하여 처리함

Ⅲ		폐기물 변경 현황

구분	종류	단위	수 량				비고
			당 초	변 경	증 · 감
총 괄	폐콘크리트	톤	6,516	7,138	증	622
	폐아스콘		1,751	1,877	증	126
한강공원 나들목 증설공사(옥수)	폐콘크리트	톤	3,893	3,893
			676	676
	폐아스콘
한강공원 나들목 증설공사(낙천정)	폐콘크리트	톤	1,268	1,268
	폐아스콘		906	906
한강공원 나들목 증설공사(신청담)	폐콘크리트	톤	999	999
	폐아스콘		169	169
한강제방 긴급보수공사(망원)	폐콘크리트	톤	117	117
영동대교 남단보강토 옹벽보강공사	폐콘크리트	톤	30	30
잠실나들목 경사로 보수공사	폐콘크리트	톤	94	94
개화나들목차도포장(연간단가)	폐콘크리트	톤	115	115
‘16년 한강공원 접근시설(연단단가)	폐콘크리트	톤	-	235.15	증	235.15
	폐아스콘		-	89.30	증	89.30
개화나들목 개선공사(	폐콘크리트	톤	-	387.20	증	387.20
	폐아스콘		-	37.60	증	37.6

○ 폐기물 발생 현황 사진

○ 건설폐기물 처리용역 계약금액 조정현황                                (단위 : 천원)

총 괄			1 차		2 차		3 차			4차			향후
당초	변경	증	당초	변경	당초	변경	당초	변경	증	당초	변경	증
158,600	173,000	48,000	50,000	50,000	30,000	30,000	40,000	66,810	26,810	11,790	16,240	4,450	9,950

Ⅳ		조 치 계 획

◦ 공사 시행중 발생한 폐기물을 4차금액에 맞추어 폐기물 수량을 정산처리하고 과부족 수량은 장래분에 맞추어 예산반영 및 설계변경후 용역수행.  끝.