투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	납품기한 변경 요청(9호선3단계 원방제어설비)

1. 도시철도설비부-12904(2016.11.22.)호 관련으로 지하철 9호선연장건설(3단계) 원방제어설비 제작·설치에 대하여 아래와 같이 납품기한을 변경코자   하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계 약 명 : 지하철 9호선연장건설 3단계 원방제어설비 제작·설치

- 계약번호(1216004500), 구매관리번호(12152285900)

나. 계약금액 : 금937,649,900원

다. 납품기한 변경 내용

계 약 명	납품기한 변경		비 고
	변 경 전	변 경 후
지하철 9호선연장건설 3단계 원방제어설비 제작·설치	2019. 01. 05.	2018. 10. 31.	계약금액 변경 없음

라. 지체상금 부과여부 : 미 부과

따로붙임 : 납품기한 변경 보고서 및 합의서 각 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	이재영		송변전과장	박동규		도시철도설비부장	11/22 정찬웅
협조자	주무관	박우현
시행	도시철도설비부-12911	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7271	/전송	02-772-7308	/	lolee@seoul.go.kr	/	대시민공개