	서울대공원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	서울대공원 노후동물사 기계설비 가스공사 설계변경 시행

1. 시설과-7848(2016.11.23.)호와 관련입니다.

2. 서울대공원 노후동물사 기계설비 가스공사와 관련하여 물량 변경사항 등에 대하여 아래와 같이 설계변경코자 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 서울대공원 노후동물사 기계설비 가스공사

나. 공사기간 : 2016. 10. 31. ～ 2016. 11. 24.

다. 시 공 자 : 평화이엔지(주) 대표 황기평

라. 준공정산 설계변경 내역

구 분	당 초	변 경	증․감	비 고
총공사비	59,691,180원	56,601,290원	감) 3,089,890원

마. 설계변경사유 : 공사 증·감사항 정산에 따른 설계변경

바. 예산과목 : 서울대공원, 공원이용시민만족도향상, 산림내이용시설및조경관리강화, 공원시설물유지보수및시설비, 시설비

붙 임  1. 설계변경 보고서 1부.

2. 변경내역서 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

주무관	박도원		주무관	조대복		주무관	정한성		시설과장	11/23 代이춘한
협조자
시행	시설과-7852	(		)	접수		(		)
우	13829	경기도 과천시 대공원광장로 102	/	http://grandpark.seoul.go.kr
전화	02-500-7424	/전송	02-507-7230	/		/	부분공개(7)