함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	강동수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	설계변경 시행(거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관정비공사)

우리사업소에서 시행중인 『거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관정비공사』와 관련하여 아래와 같이 설계변경 시행코자 합니다.

가. 공 사 명 : 거여동 133-77 ~ 135-6간 외 2개소 송배수관 정비공사

나. 공사개요 : 당초 D=20~400㎜, L= 1424m

변경 D=20~400㎜, L= 1409m(감 15m)

다. 공사기간 : 2016. 5. 2. ~ 2016. 11. 28.

라. 계약상대자 : ㈜가가설비  대표 이성주

마. 예산과목 : 자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비[노후상수도관(송배수관)정비]

바. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증•감

사. 변경 금액

구 분	당초 금액	변경 금액	비 고
도 급 비	410,332,880	432,470,000	증) 22,137,120

붙  임 :  1. 설계변경 내역서 1부.                   추산번호 : 33770번

2. 설계변경 심의결과 보고서 1부. 끝.

주무관	조봉구		주무관	代최현철		★급수운영과장	전명수		강동수도사업소장	11/23 김명용
협조자	주무관	임인택		주무관	김용현
시행	급수운영과-22017	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5172	/전송	02-3146-5189	/		/	부분공개(5)