문서번호	시설과-8644
결재일자	2016.11.23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	조경팀장	시설과장	중부공원녹지사업소장
김기수	이무림	김재균	11/23 이용태
협 조
	재무팀장		정금자
	주무관		전정아

『2016년 남산공원 실개천 보수공사』 설계변경 검토보고

2016. 11.

중부공원녹지사업소

(시설과)

『2016년 남산공원 실개천 보수공사』

설계변경 검토보고

『2016년 남산공원 실개천 보수공사』 추진과 관련하여 외부전문가 자문회의 의견사항을 반영하여 공사 품질향상 및 효과적인 정비를 위하여 아래와 같이 설계변경 시행하고자 합니다.

공사현황

공 사 명 : 2016년 남산공원 실개천 보수공사

도급금액 : 금295,296,000원(금이억구천오백이십구만육천원)

공사기간 : 2016. 8. 19. ~ 2016. 12. 16.

공사내용

- 식재공사 : 노랑꽃창포, 맥문동, 옥잠화 등 8종 22,100본

- 시설물공사 : 실개천 바닥방수, 돌쌓기 정비 등

도 급 자 : 옥포건설㈜ 대표 김수곤

주요 설계변경 내용

구 분	변 경 내 용	비 고
식재 및 시설물 정비	▶ 실개천변 녹지공간내 초화류 식재 추가 반영 - (당초) 노랑꽃창포 등 8종 22,100본 식재 - (변경) 소엽맥문동 등 4종 36,280본, 식물매트 7종 3,550매 수로식재(옥잠화등 14종) 15,570본 ▶ 실개천 바닥방수공사 제외하고 소류지조성 반영 - (당초) 바닥방수(부직포,PE필름깔기) 5,302㎡ 바닥방수(방수시트깔기) 1,767㎡, 돌쌓기정비 302ton - (변경) 소류지조성 2개소(161.5㎡), 식생개비온 설치(54개) 자연석정비 199ton	감56,000원
관급자재	▶ 실개천변 식재물량 추가 및 산책로변 노후정자 정비 반영 - (당초) 노랑꽃창포 등 8종 22,100본 - (변경) 식물매트 7종 3,550매, 수로식재(옥잠화등 14종) 15,570본 실개천 산책로변 사각정자 설치 1개	증13,381,860원

도급공사비 (감56,000원)

(단위:원)

구 분		도 급 비 (원)			비 고
		당 초	변 경	증 감
도급비	공 급 가 액	268,450,910	268,400,000	감50,910
	부가가치세	26,845,090	26,840,000	감5,090
	합 계	295,296,000	295,240,000	감56,000

관급자재비 (증13,381,860원)

(단위:원)

구 분	관급자재비 (원)			비 고
	당 초	변 경	증 감
관급자재비	133,316,040	146,697,900	증13,381,860

예산과목 : 물순환안전국, 물순환정책과, 깨끗한물관리, 물환경개선              및 관리, 서울시 물길조성 추진계획, 시설비(100-401-01)

검토의견

실개천 보수공사 추진과 관련하여 외부전문가(조경 및 시공분야, 생태분야,

초화류분야) 자문의견 사항을 반영하여 효과적인 정비를 통해 시민들이 쾌적 하게 공원을 이용할 수 있도록 조성하고자 함.

※ 2016.9.12. : 외부전문가 자문회의 개최 (시설과-7045호 참조)

증액되는 예산은 본 공사의 집행잔액을 활용하여 추진하고자 함.

붙임  1. 설계변경내역서 1부.

2. 계약금액조정 검증확인서 1부.

3. 외부전문가 자문회의 결과보고 1부. 끝.