투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2016년 뚝섬한강공원 운동장 재정비 공사

1. 녹지관리과-3787(2016.08.31.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 뚝섬한강공원 운동장 재정비 공사」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	2016년 둑섬한강공원 운동장 재정비 공사
계약상대자	반월개발(주) (대표 : 윤경숙)
계 약 금 액	금148,660,970원(금일억사천팔백육십육만구백칠십원)
계 약 일 자	2016.06.10.
공 사 기 간	2016.06.10. ~ 2016.09.07.

나. 변경내역 : 공사기간 변경(2016.06.10. ~ 2016.09.30.)

변 경 내 역	변경전	변경후
공 사 기 간	2016.06.10. ~ 2016.09.07.	2016.06.10. ~ 2016.09.30.

다. 변경사유 :  지속적인 폭염으로 인한 안전사고 방지 및 지열상승으로 인한 포장                           품질저하 우려 등 절대공기 부족

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 납부필증빙서 1부.

4. 공사계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	11/23 이상국
협조자
시행	총무과-20687	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)