투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 한강준설(저수로, 취수장) 정비 공사

1. 치수과-2836(2016.8.17.)호와 관련입니다.

2. 「한강준설(저수로, 취수장)정비 공사」 건에 대하여 다음과 같이 변경계약을 체결하고자 합니다.

계 약 현 황	공 사 명	한강준설(저수로,취수장) 정비 공사
	계약상대자	관악산업(주) (대표 : 이규형)
	계약일자	2016.03.28. (총 차 : 2016.03.28.)
변 경 내 역	내 용	계약금액 변경 (총차3,944,000,000원/1차1,474,000,000원), 계약기간 변경 (1차2016.04.01. ~ 2016.12.30.)
	변경사유	한강 관광자원화 사업 일환으로 행주대교 남단 경인아라뱃길 서해갑문 주변 준설 등, 국비예산배정 지연으로 2차사업 구간 절대공기 부족
기 간 변 경	변경전착공일자		2016.04.01.	변경후착공일자	2016.04.01.
	변경전금차준공기한		2016.11.30.	변경후금차준공기한	2016.12.30.
	변경전총공사기한		2016.11.30.	변경후총공사기한	2016.12.30.
금 액 변 경	총부기계약금액(증756,254,000원)			금차계약금액
	변 경 전		3,187,746,000 원	변 경 전	1,474,000,000 원
	변경금액		756,254,000원	변경금액	- 원
	변 경 후		3,944,000,000 원	변 경 후	1,474,000,000원

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 납부필증명서 1부.

3. 계약의뢰서 1부.

4. 공사계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	11/23 이상국
협조자
시행	총무과-20702	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(5)