투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약체결 - 2016년 여의도 생태숲 조성공사

1. 생태공원과-3638(2016.11.11.)호와 관련입니다.

2. 「2016년 여의도 생태숲 조성공사」건에 대하여 다음과 같이 변경 계약을 체결하고자 합니다.

가. 계약현황

공 사 명	2016년 여의도 생태숲 조성 공사
계약상대자	태림조경(주) (대표 : 정명선)
계 약 금 액	금775,797,160원(금칠억칠천오백칠십구만칠천일백육십원)
계 약 일 자	2016.05.25.
공 사 기 간	2016.05.27. ~ 2016.11.15.

나. 변경내역 : 금액 변경(증58,241,840원)

변 경 내 역	변경전	변경후
금 액 변 경	775,797,160	834,039,000

다. 변경사유 :  영등포구 민원 등 현장여건 반영

붙     임 : 1. 공사변경계약서 1부.

2. 계약의뢰서 1부.

3. 납부필증빙서 1부.

4. 공사계약 조건 및 관련 예규 1부.  끝.

주무관	주홍열		총무과장	박병현		총무부장	11/23 이상국
협조자
시행	총무과-20706	(		)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로 257 (성수동1가)	/
전화	02-3780-0723	/전송	02-3780-0740	/		/	부분공개(7)