문서번호	시설과-6571
결재일자	2016.11.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설팀장	시설과장
강희진	임록화	11/23 진병규
협 조

함평·서천 가족자연체험시설조성공사 CCTV 조달구매 납품기한 연기 검토보고

2016. 11

동부공원녹지시업소

(시설과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

함평·서천 가족자연체험시설조성공사 CCTV 조달구매

납품기한 연기 검토보고

○ 우리사업소에서 시행하고 있는 함평군 성남초 및 서천군 장선초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)에 사용할 CCTV 납품기한 연기가 필요하여 검토보고 합니다.

Ⅰ		관련근거

❍ 시설과-6543(‘16.11.22) 함평․서천 가족자연체험시설 조성공사 옥외조명 조달구매 납품기한 연기 검토보고

Ⅱ		공사개요

구분	함평	서천	비고
공사명	함평군 성남초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)	서천군 장선초 가족자연체험시설 조성공사(전기, 전기소방)
공사위치	전남 함평군 함평읍 성남리 215	충남 서천군 마서면 장선리 128-3
공사기간	‘16.9.26~11.26	‘16.9.26~11.26
공사비	167,224천원	78,326천원
시공사	㈜국제전기 대표 김효식	금산전업사 대표 김형태

Ⅲ		관급자재(CCTV)계약현황

(단위 : 원)

위 치	규격	계약업체	수량	계약금액	납품기한	비고
서천	CCTV 200만화소 13종	이노뎁(주)	21	13,594,300	‘16.11.30
함평	CCTV 200만화소 14종	이노뎁(주)	23	14,430,300	‘16.11.30

Ⅳ		연기내용 검토

❍ 연기사유 : 선행 건축공정 지연으로 납품(설치) 시기 미도래

❍ 납품기한 연기

건명	납품기한		비고
	당초	변경
서천 가족자연체험시설 CCTV 조달구매	‘16.11.30	‘16.12.20	20일 연기
함평 가족자연체험시설 CCTV 조달구매	‘16.11.30	‘16.12.20

❍ 귀책소재 : 동부공원녹지사업소

❍ 지체상금 부과여부 : 미부과

Ⅳ		조치의견

❍ 공정에 맞춰 납품될 수 있도록 납품기한을 연기하고자 함.

따로붙임 : 납품계약서 1부.  끝.