투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	설계변경 시행 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역 계약의뢰

한강수해예방 및 유수소통을 위해 『한강준설(저수로, 취수장) 정비공사 감독권한대행 건설사업관리용역』에 대해 아래와 같이 설계변경(1회) 계약을 의뢰합니다.             가. 용 역 명 : 한강준설(저수로, 취수장) 정비공사

감독권한대행 건설사업관리용역

나. 계약기간 : 2016. 3.31 ∼ 2016.11.29

다. 계약금액 : 195,379,000원

마. 감 리 사 : 주식회사 대한콘설탄트 대표 이우정

바. 변경내용

구 분	용 역 비			비고 (단위:원)
	당 초	변 경	증·감
감 리 비	195,379,000	195,379,000	-

사. 설계변경사유

- 건설사업관리자 투입계획 변경

아. 준공기한연기

- 당    초 : 2016.3.31. ~ 2016.11.29

- 변    경 : 2016.3.31. ~ 2016.12.30

- 연기사유 : 국비 예산배정 지연으로 2차사업 구간 절대공기 부족으로 건설사업관리자 투입기간 조정

- 귀채소재 : 한강사업본부

- 지체상금 : 미부과

자. 예산과목

- 깨끗하고 안전한 한강만들기, 한강하천시설관리, 한강저수로정비, 감리비

- 깨끗한 물관리, 한강수질개선, 잠실상수원퇴적물준설, 감리비

첨부 : 1. 설계변경 방침서 1부

2. 투입계획 변경 보고서 1부

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서 1부.  끝.

	치수과장
주무관	김동식		치수과장	11/23 신용철
협조자
시행	치수과-4139	(		)	접수		(		)
우	04770	서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25)	/
전화	02-3780-0687	/전송	02-3780-0744	/		/	대시민공개