투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	건설총괄부장
(경유)
제목	관급자재(레미콘) 납품기한 연장 요청 (재사용플라자 건립공사)

1. PC재사용16-549(‘16.11.24)호와 관련입니다.

2.「재사용플라자 건립공사」관급자재(레미콘) 납품기한 변경요청이 있어 검토한 바, 아래와 같은 사유로 연장코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 물 품 명 : 레미콘

나. 계 약 자 : 서울경인레미콘공업(협)

다. 납품기한 변경사항

계약번호 (납품요구번호)	품 명	계약자	납품기한		비고
			변경 전	변경 후
12151035000 (12-15-1-49705-01)	레미콘	서울경인레미콘공업(협)	‘16.02.03 ∼ ’16.11.30	‘16.02.03 ∼ ’17.02.28	연장
12161058800 (12-16-1-45817-00)	레미콘	서울경인레미콘공업(협)	‘16.08.17 ∼ ’16.11.30	‘16.08.17 ∼ ’17.02.28

라. 사   유 : 공기연장에 따른 부대공사(조경,토목) 공정계획과 연계하여 납품기한 연장 필요

마. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과)

붙 임 : 관급자재(레미콘) 납품기한 연기요청(건설사업관리단 검토의견서포함) 1부. 끝.

	건축부장
주무관	김찬유		환경시설과장	유현수		건축부장	11/24 김진용
협조자
시행	건축부-16290	(		)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8(무교동 96번지)프리미어플레이스 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2649	/전송	02-3708-2659	/	kcy111@seoul.go.kr	/	부분공개(5)