투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신자	건설총괄부장
(경유)
제 목	관급자재(금속제창) 납품기한 연장 요청(북부여성창업플라자 조성공사)

우리본부가 공사 시행 중인「북부여성창업플라자 조성공사」관급자재(금속제창) 납품기한을 아래와 같이 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 납품기한 변경사항

납품요구번호	계약 업체명	규격	단위	수량	납품기한 (연기)	비고
12-16-1-50597-00	㈜경원알미늄	KW-AW-FP(100mm) 단열커튼월+프로젝트창	KG	14,738.82	2016.12.30.

나. 사    유 : 롤방충망 시공일정 조정등에 따른 납품기한 연장 필요

다. 귀책사유 : 도시기반시설본부(지체상금 미부과).  끝.

	건축부장
주무관	신효섭		건축관리과장	곽동호		건축부장	11/24 김진용
협조자
시행	건축부-16298	(		)	접수		(		)
우			/	http://infra.seoul.go.kr
전화		/전송	02)3708-2659	/		/	대시민공개