투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	관급자재 납품기한 연기요청(함평, 서천 캠핑장 CCTV)

우리사업소에서 추진하고 있는 함평, 서천 캠핑장에 사용할 CCTV(조달구매)의 납기를 아래와 같이 연장하여 주시기 바랍니다.

1. 납품기한 연기내용

구매건명	계약업체	계약금액 (원)	납품기한		비고
			당초	변경
서천 장선초 가족자연체험시설 조성공사 CCTV 조달구매	이노뎁(주)	13,594,300	‘16.11.30	‘16.12.20	20일 연기
함평 성남초 가족자연체험시설 조성공사 CCTV 조달구매	이노뎁(주)	14,430,300	‘16.11.30	‘16.12.20

2. 연기사유 : 납품(설치)시기 미도래

3. 지체상금 부과여부 : 미부과

따로붙임 : 검토보고서 1부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설팀장	임록화		시설과장	11/24 진병규
협조자
시행	시설과-6620	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개