투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	동부공원녹지사업소
수신자	공원운영과장
(경유)
제 목	공사 준공기한 연기요청(서천, 함평캠핑장(전기, 전기소방))

우리 사업소에서 시행하고 있는 『2016 가족자연체험시설 조성공사』 전기, 전기소방 분야 시행과 관련 아래와 같이 준공기한을 연기 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

○ 준공기한 연기요청

항목		서천	함평	비고
공사명		서천군 장선초 가족자연체험 시설 조성공사(전기, 전기소방)	함평군 성남초가족자연체험 시설 조성공사(전기, 전기소방)
도급액(원)		51,585,450	121,453,540
공사기간		‘16.9.28.～’16.11.26	‘16.9.28.～’16.11.26
도급자		금산전업사 김형태	(주)국제전기 김효식
준공기 한연기	당초	‘16.9.28～’16.11.16	‘16.9.28～’16.11.26
	변경	‘16.9.28～’16.12.20	‘16.9.28～’16.12.12

붙 임 : 방침서 및 준공기한 연기의뢰서 각 2부.  끝.

	시설과장
주무관	강희진		시설팀장	임록화		시설과장	11/24 진병규
협조자
시행	시설과-6619	(		)	접수		(		)
우	07062	서울특별시 동작구 여의대방로20길 33 (신대방동)	/
전화	02-2181-1156	/전송	02-2181-1169	/	jhg815@seoul.go.kr	/	대시민공개