문서번호	하천관리과-17653
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
실무사무관		하천계획팀장	하천관리과장
권영민		심형보	11/24 이진용
협조
	치수관리팀장		지승현

하천통합관리방안 연구용역

설계변경 검토 보고

2016. 11.

물순환안전국

(하천관리과)

하천통합관리방안 연구용역

설계변경 검토 보고

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

“하천통합관리방안연구 용역”과 관련하여 과업기간(추가연구과제 수행을 위한 절대공기부족) 변경에 따른 설계변경을 시행하여 용역수행에 철저를 기하고자 함

□ 용역개요

○ 용 역 명 : 하천통합관리방안 연구용역(하천의 재해예방 및 기능회복을 위한)

○ 용역기간 : 2016. 3. 15. ~ 2016. 12. 31.

○ 용 역 사 : (재)서울연구원

○ 용역금액 : 132백만원

□ 준공기간 연장 : 5개월

○ 준공기간 변경 : 2016. 12. 31 ⇒ 2017. 5. 15 (5개월)

○ 변경 사유 : 추가연구 과제 수행을 위한 과제 기간 연장 필요

1) 하천이용시설 905개의 중복성 판정 및 중장기적인 통합 설치관리 방안 마련

- 하천이용시설물 통합설치기준(시민이용성, 편의성, 재해영향성 평가)을 적용하여 기존 905개 하천이용시설물의 중복 설치된 시설물을 조사 선별

- 하천이용시설물의 이용성 및 편의성이 확보되고 재해영향이 없는 중장기적인 시설물 설치 관리방안 마련

2) 26개 하천 주변 주민대상의 통합설치 관리기준에 대한 설문조사 실시

- 하천 이용시설물의 통합설치 관리 기준을 하천시설물 이용자인 시민들의 의견을 반영하기 위하여 설문조사 실시

3) 하천권역별 주민참여형 하천시설물 통합관리 조직 마련

- 하천권역별 하천이용시설 통합관리는 “주민참여형 하천관리”하는 방향으로 통합 조직(신설)을 마련하기 위하여 하천 26개에 대하여 지역 주민의 역할을 하천 특성에 맞도록 도출하고 하천 이용시설물의 설치 및 관리에 주민이 직접 참여할 수 있는 조직체계 마련

- 하천이용시설 통합조직에서 실질적인 현장관리가 이루어지도록 자치구 및 협의체 방안마련

□ 설계변경 내용

○ 추가용역비

1) 책임연구원, 연구원, 연구보조원, 보조원 노무비

- 당초 9.7개월 ⇒ 변경 14개월 연장 산출

<단위 : 천원>

구 분	당 초	변 경	증․감	비고
총 용 역 비	132,000	171,000	증 39,000
가. 직접인건비	79.128	117,097	증 37,969
나. 제경비	52,872	53,903	증 1,031

□ 조치계획

○ 용역비 확보

1) 재난관리기금 잔액 40,000천원에서 사용

- 재난기금확보 180백만원,  설계비 140백만원

- 예산과목: 물순환안전국하천관리과/수자원/치수및하천관리/치수사업/재난예방

○ 상기와 같이 설계변경하여 용역 추진에 철저를 기하고자 함

별첨 : 설계변경 내역서 1부.   끝.