문서번호	도시철도설비부-12987
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정보통신과장	도시철도설비부장
배종수		추경수	11/24 정찬웅
협 조

『서울지하철 9호선 연장건설(3단계)

1구간 정보통신공사(2차)』준공기한 연기 검토보고

2016. 11.

『서울지하철 9호선 연장건설(3단계)1구간 정보통신공사(2차)』

준공기한 연기 검토보고

우리본부에서 시행중인 지하철9호선 연장건설(3단계) 정보통신공사(2차) 준공기한 연기에 대한 검토 보고.

		사업 개요

구 분	서울지하철 9호선 연장건설(3단계) 정보통신설비공사(2차)
계 약 번 호	15120559
계 약 기 간	(총차)	2014. 12. 31 ~ 2018. 01. 11
	(2차)	2015. 11. 23 ~ 2017. 01. 11
계 약 자	㈜일광기업 오도진
계 약 금 액	(총차)	금5,786,476,800원
	(2차)	1,000,000,000원

		연기요청 내용

구 분		준공 기한 연기		연 기 사 유
		당 초	변 경
정보통신 공사	2차	2015. 11. 23 ~ 2017. 01. 11	2015. 11. 23 ~ 2017. 07. 31	- 토목, 건축 등 선행 주공정인 터널 및 정거장 공사가 완료 되지 않아 본선 정보통신공사 현장 시공 여건 미비

		준공기한 연기사유

선행 주공종인 토목공사 지연으로  현장시공 여건 미비

▷ 919, 920공구 터널굴착공사 완료시기 미도래(‘17.5월 완료예정)로 인한   터널내 케이블 트레이, 열차무선케이블 설치 시기 조정

공구	작업구간	토목완료 예 정 일	지연사유
919공구	33K670~35K230	‘17.06.30	상•하선 1터널, 하선 2터널 미개통으로 통신공사 시공 불가
920공구	35K230~36K620	‘17.03.31	상•하선 2터널 미개통으로 통신 공사 시공불가

▷ 본선터널 완료일정에 맞추어 준공기한 연기

지체상금 부과여부 : 미부과

연기사유 귀책소재 : 서울특별시 도시기반시설본부

조치의견

▷ 지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준 제13장 공사계약 일반조건 8절  2항 계약기간의 연장(안행부 예규 74호, ‘14.2.7)에 의거 선행공정완료 후 통신설비 설치에 따른 기한이 필요한 바 2017.07.31 까지 준공기한 연기 시행  조치 하고자 합니다.

붙임 : 감리검토의견서 및 준공기한 연기 동의서.  끝.