문서번호	생산관리과-16597
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		생산관리과장	생산부장
신왕근		한희선	11/24 구자훈
협 조

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

2016.  11.

상수도사업본부

(생산관리과)

『뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

“뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사” 관급자재(PHC파일외 2종)와 관련하여 건설사업관리책임자로부터 납품기한 연기 요청이 있어 이에대한 검토사항을 보고 드림

Ⅰ		계약 현황

계약건명	계약업체	계약금액(원)	납품기한
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 PHC파일 구매	신아산업개발(유) 대표자 이승섭	261,613,000	2016.11.21. (분할납품)
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(레미콘) 구매	성신양회(주) 대표자 김상규 외 3개사	318,495,090	2016.11.30. (분할납품)
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(아스팔트콘크리트) 구매	남부아스콘사업협동조합 대표자 박열규	52,136,570	2016.11.30. (분할납품)

Ⅱ		연기 사유

❍ 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간 연기〔당초:   ’15.11.27~’16.08.31 → 변경:’15.11.27~’17.06.30〕에 따른 관급자재   사용시기 미도래

❍ 관급자재(PHC파일)를 현장 사용시기에 반입함에 따라

- 품질(손상 등) 및 자재관리(보관관리)에 유리

- 안전관리(부지협소로 높이 쌓아 보관시 전도위험 등)에 유리

- 현장관리(통행로 협소 방지 및 작업공간 확보)에 유리함

❍ 관급자재(레미콘, 아스팔트콘크리트)는 현장 시공시에만 자재사용 가능

Ⅲ		CM 검토 의견

1. PHC파일 납품기한 변경

❍ 계약내용

- 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 PHC파일 구매

- 계 약 자 : 신아산업개발(대표:이승섭)

- 계약금액 : 금261,613,000원

- 계약일자 : 2016. 05. 25

- 납품기한 : 2016. 11. 21(분할납품)

❍ 납품기한 변경 내용

〔당초〕’16.5.25.~’16.11.21. ⇒ 〔변경〕’16.5.25.~’16.12.30.

2. 레미콘 납품기한 변경

❍ 계약내용

- 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(레미콘) 구매

- 계 약 자 : 성신양회(대표:김상규)외 3개업체

- 계약금액 : 금318,495,090원

- 계약일자 : 2016. 05. 26.

- 납품기한 : 2016. 11. 30.(분할납품)

❍ 납품기한 변경 내용

〔당초〕’16.5.26.~’16.11.30. ⇒ 〔변경〕’16.5.26.~’17.06.30.

3. 아스팔트콘크리트 납품기한 변경

❍ 계약내용

- 계약건명 : 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(아스팔트콘크리트) 구매

- 계 약 자 : 남부아스콘사업협동조합(대표:박열규)

- 계약금액 : 금52,136,570원

- 계약일자 : 2016. 03. 23.

- 납품기한 : 2016. 11. 30.(분할납품)

❍ 납품기한 변경 내용

〔당초〕’16.3.23.~’16.11.30. ⇒ 〔변경〕’16.3.23.~’17.06.30.

Ⅳ		조치 의견

❍ 관급자재(PHC파일외 2종) 구매 계약변경(납품기한 연기)에 대한  책임건설사업관리기술자의 요청 의견이 적정하므로 상기 변경내용 으로 재무회계과에 변경계약 의뢰하여 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량사업에 만전을 기하고자 함.

따로붙임 : 관급자재(토목) 납품기한 연기 요청 공문 1부. 끝.