함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신자	재무회계과장
(경유)
제 목	관급자재(PHC파일, 레미콘, 아스팔트콘크리트) 납품기한 연기 요청

“뚝도정수센터 농축조공사 관급자재(PHC파일, 레미콘, 아스팔트콘크리트) 구매 계약”과 관련하여 아래와 같이 변경 계약코자 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 계약변경 내용 : 납품기한 연기

계약건명	계약업체	계약금액 (원)	납품기한
			당초	변경
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재 PHC파일 구매	신아산업개발(유) 대표자 이승섭	261,613,000	’16.05.25. ~’16.11.21.	’16.05.25. ~’16.12.30.
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(레미콘) 구매	성신양회(주) 대표자 김상규외 3개사	318,495,090	’16.05.26. ~’16.11.30.	’16.05.26. ~’17.06.30.
뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사 관급자재(아스팔트콘크리트) 구매	남부아스콘사업협동조합 대표자 박열규	52,136,570	’16.03.23. ~’16.11.30.	’16.03.23. ~’17.06.30.

나. 연기사유 귀책 소재 : 업체에 해당없음

다. 납품기한 연기 사유

- 뚝도정수센터 농축조 증설 및 개량공사(토목,기계) 공사기간 연기 〔당초: ’15.11.27~’16.08.31 → 변경: ’15.11.27~’17.06.30〕에 따른 관급자재 사용시기 미도래

- 자재 사용시기에 반입하여 적정한 품질 및 보관관리, 안전관리, 현장관리

- 레미콘, 아스팔트콘크리트는 현장 시공시에만 자재납품 가능

따로붙임 : 1. 납품기한 연기 방침서 1부.

2. 책임건설사업관리자 공문 1부. 끝.

	생산관리과장
주무관	신왕근		생산관리과장	11/24 한희선
협조자
시행	생산관리과-16607	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1317	/전송	02-3146-1319	/	swgking@seoul.go.kr	/	대시민공개