“내 집, 내 점포 앞 눈치우기”로 더 행복해지는 우리 마을
	서울특별시
수신	재무과장
(경유)
제목	홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사 관급자재 구매 계약 변경 의뢰

1. 관광정책과-15040(2016.11.24.)호와 관련입니다.

2. 시행 중인 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사의 관급자재 구매 계약을 아래와 같이 변경하고자 하오니 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 홍대 걷고싶은거리 문화관광 명소화 전기공사 관급자재 구매

나. 납 품 일 : ’16.12. 4

다. 구매금액 : 1,718,000원

라. 예산과목 : 관광사업과, 서울만의 특화관광자원을 활용한 서울관광 활성화, 서울
강점 특화관광 콘텐츠 확충, 서울 매력명소 관광자원 개발 활용, 시설비

마. 설계변경내역

구 분	변 경 내 용
계약금액	당 초	1,718,000원
	변경후	1,280,000원
	증감액	438,000원(감액)
납 품 일	당 초	2016년 12월 4일
	변경후	2016년 12월 20일
	변경일	16일(연장)

바. 설계변경사유

- 여행자 편의시설 규모 변경에 따른 조명등 설치 수량 조정

- 제작 기간을 고려하여 납품일 변경

붙  임 : 1. 설계변경계획 방침 1부.
2. 합의각서 1부.
3. 설계내역서 1부. 끝.

	관광정책과장
주무관	김보경		지역관광진흥팀장	권영문		관광정책과장	11/24 김재용
협조자
시행	관광정책과-15056	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15 (서소문동)	/
전화	2133-2817	/전송	2133-1067	/	megbkkim@seoul.go.kr	/	부분공개(6)