문서번호	토목부-24227
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		도시고속도로과장	토목부장
박운용		명경출	11/24 김영수
협조

광명고가교 하부 지장물(광명시 임시창고) 이설 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시기반시설본부

(토목부)

광명고가교 하부 지장물(광명시 임시창고) 이설 검토보고

- 광복교~안양교 도로확장공사 -

안양교 교통우회용 가교에 저촉되는 광명고가교 하부 EGI휀스 및 컨테이너(광명시 지도민원과 임시창고)이전 설치 검토보고임.

▢ 관련근거

○ 광안건 제2016-174호(2016. 11. 21.) :

광명고가차도 하부 EGI휀스 철거 및 이전설치 실정보고 승인 요청

▢ 공사개요

○  위   치  : 구로구 개봉동 198-32~구로동 693-2

○ 규    모  : 도로확장(B=4,5차로→6차로, L=1.11km)

- 광복교 보도설치(L=67m), 안양교 철거 및 신설(L=275m, 아치교)

○ 공사기간  : '16. 4. 1. ~ '19. 9.12

○ 도 급 비  : 42,186백만원(1차 : 4,710백만원)

○ 시 공 사  : ㈜KCC건설

○  감 리 사  : ㈜동부엔지니어링외 2개사

▢ 관련 추진경위

○ `16.05.23. : 공사 저촉 지장물 이설 협의 요청(토목부-10274호)

○ `16.08.03. : 지장물 철거 및 이설 설치 요청(광명시 지도민원과-24662호)

- 불법광고물 및 노상적치물 수거물품 보관창고를 이전 설치 요망

- 이전설치 요청 장소(`16.10월 유선통보) : 광명시 노온사동 100-16번지

▢ 건설사업관리단 보고내용

○ 도로확장 및 교통우회용 가교 설치에 저촉되는 광명고가교 하부 EGI휀스 및 임시보관창고는 광명시(지도민원과) 요청에 의거 이설 조치함이 타당하고,

○ 철거된 휀스 및 비계파이프는 재사용이 어려워 고재처리하고, 신재를 사용하여 이전 설치하고자 함.

공종명	규 격	단위	당 초	변 경	증⦁감	비고
EGI휀스 설치	H2.4m×H2.4m	m	-	62	62
EGI휀스 철거	H4.8m×H2.4m	m	-	46	46
출입문 설치	L=4m	개소	-	1	1
컨테이너 운반	3×6m	식	-	1	1

▢ 수량 증⦁감 대비표

▢ 공사비 증⦁감 대비표                                                                                                                                             (단위:천원)

구 분	당 초	변 경	증·감	비고
직접공사비	-	4,812	4,812
제 잡 비	-	1,588	1,588
도 급 비	-	6,400	6,400

※ 적용단가 협의내용 : 강제 협의율 적용(85.081%)

▢ 조치계획

○ 상기 책임건설사업관리자의 보고내용과 같이 도로확장 및 교통우회용 가교에 저촉되는 광명시 관리시설물(불법광고물 및 노상적치물 수거 창고)을 광명시 요구에 따라 이전 설치하고 추후 설계변경에 반영하고자 함.

붙임 : 건설사업관리단 검토의견서 1부.  끝.