문서번호	설비부-18233
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		녹색성장과장	설비부장
신정규		김창균	전결 11/24 권오식
협조

『석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 11.

도시기반시설본부

( 설 비 부 )

『석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사』

관급자재 납품기한 연기 검토 보고

『석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사』와 관련 책임건설사업관리기술자로부터 전기공사의 관급자재 납품기한 연기요청이 있어 검토 보고 드림.

근    거

○ 석촌감 16-056(2016.11.23.)호 관급자재 납품기한 연기검토보고

보고내용

○ 관급자재 계약 현황(석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사)

품 명	계 약 자	납품기한		납품금액	납품요구번호
		당 초	변 경
분전반	두리계전	2016.11.30	2017.5.2.	3,300,000	121621349800

○ 납품기한 연기사유 : 납품시기 미도래

○ 귀책사유 : 도시기반시설본부

○ 지체상금 부과여부 : 미부과

○ 계약금액 : 변경없음

○ 책임건설사업관리기술자 의견

- 석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사 중 관급자재의(분전반) 납품시기           미도래에 따른 납품기한 연기조치 필요

조치의견

○ 책임건설사업관리기술자의 의견이 적정한 것으로 판단되며 원활한 사업추진을 위하여 석촌지하차도 상부도로 구조개선 전기공사 관급자재(분전반) 납품기한을 연기코자 함.

행정사항

○ 건설총괄부에 납품기한 연기 의뢰

붙임  1. 물품 납품기한 연기요청 공문(감리기술검토서) 1부.

2. 물품 납품기한 연기 합의서 1부.  끝.