문서번호	도시철도토목부-14731
결재일자	2016.11.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		토목1과장	도시철도토목부장
이경훈		윤방식	11/24 김진팔
협조
	주무관		임경태

『하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사』

건설사업관리용역(4차) 발주계획 보고

2016. 11.

도시기반시설본부

(도시철도토목부)

『하남선(5호선연장) 1-2구 건설공사』

건설사업관리용역(4차) 발주계획 보고

「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사」의 원활한 공사관리를 위하여 추진 중인 건설사업관리용역(4차)에 대한 발주계획을 검토한 보고임. ※관련문서 : ㈜대한콘설탄트 대한(철도) 제16-231(2016.11.21.)

1

용 역 개 요

❍ 용 역 명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

❍ 공사개요 : 연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

❍ 용역금액 : 총괄) 1,980,979천원

❍ 계 약 자 : ㈜대한콘설탄트 이우정 외 2

❍ 용역금액 : 2015.03.13. ~ 2018.08.08.

❍ 계약현황

(단위 : 천원)

구분	총괄	1~2차(준공)	3차(진행중)	장 래	비고
용역기간	‘15.03.13 ~’18.08.08	‘15.03.13 ~16.04.13	‘16.04.14 ~16.11.30	-
용 역 비	1,980,979	435,101	342,000	1,203,878

2

보 고 내 용

❍ 4차 발주계획

- 용역기간 : 2016.12.01.~2017.12.31

- 용역금액 : 722,000천원

- 투입인원 : 상주–48.0인․월, 기술지원-8.4인․월

❍ 건설사업관리기술자 투입계획(4차)

등 급		계약기간 및 감리투입계획	비 고
토목	특급	‘16.12.01 ~ 17.12.31
	고급	‘16.12.01 ~ 17.12.31
	중급	‘16.12.01 ~ 17.12.31
	중급	‘17.11.01 ~ 17.12.31
	초급	‘16.12.01 ~ 17.12.31

3

조 치 계 획

❍ 하남선1-2공구 건설공사의 원활한 공사추진을 위해 아래와 같이 건설사업관리용역(4차)을 발주코자 함.

구 분	용역기간	계약금액	비 고
4차	‘16.12.01 ~‘17.12.31	722,000천원

붙임 : 1. 건설사업관리용역(4차) 발주요청(공문) 1부.

2. 설계내역서(4차) 1부. 끝.