함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	암사아리수정수센터
수신	행정관리과장
(경유)
제목	「장외영향평가서 및 위해관리계획서 작성 용역」준공기한 연기 의뢰

1. 우리 정수센터 「장외영향평가서 및 위해관리계획서 작용 용역」 작성 용역의 준공기한 연기를 아래와 같이 의뢰합니다.

가. 건    명 : 장외영향평가서 및 위해관리계획서 작용 용역(일반용역)

나. 계 약 자 : 한국산업안전관리원(주)  이상용

다. 계약금액 : ￦41,918,150

라. 용역기간

당 초	변 경
’16.7.1.~’16.11.29.	’16.7.1.~’17.3.31.

바. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

첨 부 : 1. 보고서 1부.

2. 합의서 1부.  끝.

	정수과장
주무관	최재호		정수과장	11/24 하은경
협조자	주무관	백석현
시행	정수과-5251	(		)	접수		(		)
우	05205	서울특별시 강동구 아리수로 131	/
전화	02-3146-5758	/전송	02-3146-5706	/	gibbs1@seoul.go.kr	/	대시민공개